보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	송현우	강동철	06/29 이자화

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여  급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사종류	작업지시 번호	비 고
1	********************	개량	*****

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 작업지시를 하였으나, 간선도로 공사 야간공사가 필요한 실정에 도로관리청 및 관악경찰서 협의가 지연되어 유수장애 굴착 공사진행이 어려움으로 공사연기가 필요한 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
*****	’16. 05.26 ~ ‘16.06.30’	’16. 05.26~‘16.07.20

끝.