서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	창동.상계 경제기반형 도시재생활성화계획 수립용역 준공기한 연기의뢰

우리부서에서 추진중인 「창동·상계 경제기반형 도시재생활성화계획 수립」용역에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 합니다.

가. 용 역 명 : 창동·상계 경제기반형 도시재생활성화계획 수립

나. 용역기간 : 2015. 3.6. ~ 2016. 6.30

다. 용 역 비 : 금407,550천원

라. 계약업체 : ㈜아키플랜종합건축사사무소  이종길, 이재익

㈜동림피엔디               이인재

마. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	2015.3.6.∼2016. 6.30	2015.3.6.∼2016.12.30

바. 용역 연기사유 및 귀책소재

○ 연기사유

- 국토부 2016년 일반지역 도시재생사업 지역 선정 절차 변경(1,2차관문심사 추가) 및 도시재생활성화계획에 대한 도시재생특별위원회 심의 일정 연기 등에 따른 절대공기 부족으로 준공기한 연기.

(※ 2차 관문심사 : ‘16.7월, 도시재생특위 심의 : ‘16.10월, 활성화계획 확정 : ’16.12월)

○ 귀책소재 : 서울특별시

※ 사고이월 대상사업임(예산부서 협의완료)

붙 임 : 1. 합의각서 1부(원본별도 송부).

2. 준공기한 연기 방침서 1부.   끝.

	동북4구사업단장
주무관	강대양		동북권발전기획팀장	오대중		동북4구사업추진반장	06/29 代김진기
협조자
시행	동북4구사업단-6008	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 5층	/
전화	2133-8284	/전송	2133-8289	/		/	부분공개(5)