문서번호	도로보수과-6078
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	代이화신	06/29 노영석

『2016년 노후포장도로 정비공사(2구역)』  추진계획 검토 보고

2016. 6.

북부도로사업소

[도로보수과]

16년 노후포장도로 정비공사(2구역) 추진계획

우리사업소에서 시행중에 있는『2016년 노후포장도로 정비공사(2구역)』와 관련 공사추진에 따른 검토 보고임.

관련 근거

○ 도로관리과–2896호(2016.02.19.) : 2016년 노후포장도로 정비 추진계획 통보     ○ 성북구 돈암정릉주택개발 및 성북구 2016-하수-29,31 도로굴착복구허가

○ 도로관리과–8156호(2016.05.23.) : 노후포장도로 측구정비 물량조정 통보

⇒ 도로사업소 도로부수과장 회의 : 노후포장정비 일정, 측구정비 공법

○ 도로관리과–8886호(2016.06.03.) : 고내구성 서울형 포장공법 추가 통보

⇒ 시도 일반차도상 서울형 포장설계(개질SMA,SMA) 1개소 추가 검토

공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 정비공사(2구역) - 북부

○ 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 1,055a

○ 공사기간 : 2016.05.17 ~ 2015.12.31

○ 공사금액 : 669,957,830원

○ 도 급 자 : 스카이건설(주)  대표 김성기

보고내용

○ 2016년 노후포장도로 정비공사 추진 대상인 아리랑길 노선에 금년도         11월경 돈암·정릉 주택개발 정비사업에서 도로포장 계획이 있고,

성북구 치수과에서 금년부터 내년도까지 동선재수분구 하수관거 종합정비        공사로 도로 굴착후 전면 복구포장이 진행되는 도로포장구간 병합으로          금년도 포장공사에서 제외하여야 하는 실정임

○ 서울시 미세먼지 대책 관련 노후포장 도로와 연계된 측구정비 시공물량

조정(북부도로사업소 4,388m) 통보에 따른 노선별 측구 정비 예정

- 노선별 측구정비 예상 물량(추후 노선별로 내부적 측구정비공법 선정)

구분	측구정비 물량(m)
	계	도봉로	노원로	상계로	한글비석로	세검정로	창의문로	노해로
계	4,388	612	503	50	320	1,000	1,030	873
표면처리	4,002	612	357	50	235	845	1,030	873
기성제품	386	-	146	-	85	155	-	-

※ 측구정비 대상물량은 현장여건, 민원 등에 따라 물량이 조정 됨

○ 서울시 고내구성 포장공법 시험포장 추가분 대상 1개소 추진

⇒ 노후포장 정비대상인 한천로 1차로를 선정 서울시 품질시험소에 의뢰

⇒ 서울시 품질시험소에 코아채취 결과에 따라 선정된 두께로 시공

(일반차로 서울형 포장 : 일반아스팔트 포장 ⇒ 개질SMA, SMA 포장)

○ 세검정로 노면정비 구간이 설계시 1.5Km에서 실제 연장이 2.5km로

연장됨에 당초 평삭두께 10cm를 세검정로 코아채치 결과 두께조정이

필요함(구간 : 북악터널~홍지문 : 당초 1.5km ⇒ 변경 2.5km)

- 코아채취 상태 구분으로 연장 조정

·  포장부 균열이 많고 코아채취시 포장상태 부실 구간

⇒ 절삭포장 두께 10cm구간(1.1km) : 북악터널~예능교회앞 횡단보도

·  포장 균열이 많으나 코아채취시 포장상태 양호 구간

⇒ 절삭포장 두께 5cm구간(1.4km) : 예능교회앞 횡단보도 ~ 홍지문

조치의견

○ 상기 보고사항과 같이 서울시와 지속적인 업무협의 등 노선별로 원할한         사업추진을 위하여 확보된 예산범위내에서 노후포장도로 정비공사를 시행       토록하고 추후 조정된 물량을 설계변경에 반영코자 함.

행정사항

○ 해당 자치구 및 관할경찰서에 노후포장정비노선 및 측구정비 대상 통보.       끝.