투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(2016년 동부2구역 교통신호기유지보수공사(연간단가)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2016년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 03. 07. ～ 2016. 12. 31.

다. 도 급 자 : 유석산업(주) 대표 최 현호

라. 설계변경 사유 :

- 책임감리사 대영EG16B-06-22호(2016.6.29)에 의거 설계변경

- 서울지방경찰청 규제 및 신호운영실 , 다산콜센타, 기타민원사항

처리 등 물량증가에 따른 설계변경

마. 설계변경내역                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
계약금액	436,421,070	686,400,000	증)249,987,930

바. 예산과목 : - 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선,  교통안전시설물관리,

교통신호기신설 및 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

별  첨 :  1. 변경설계서 1부.

2. 2016년 교통신호기분야 예산재배정금액 및 낙찰차액 사용계획 1부.

3. 변경설계서 제출 공문사본 1부(책임감리사). 끝.

★주무관	이귀섭		기전과장	남궁영주		동부도로사업소장	06/29 임대성
협조자	주무관	이중연		계약1팀장	김점선
시행	기전과-7783	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	2040-0361	/전송	2040-0365	/	lksoub@seoul.go.kr	/	대시민공개