투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결- 반포한강공원 교통개선 진출입 연결도로 전기공사

1. 기전설비과-2355(2016.6.27.)호와 관련입니다.

2. 「반포한강공원 교통개선 진출입 연결도로 전기공사」건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	반포한강공원 교통개선 진출입 연결도로 전기공사
계약상대자	백운전업사 (대표 : 백기성)
계 약 금 액	금97,536,210원(금구천칠백오십삼만육천이백일십원)
계 약 일 자	2015.12.22.
공 사 기 간	2015.12.22. ~ 2016.06.30.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2015.12.22. ~ 2016.07.30.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2015.12.22. ~ 2016.06.30.	2015.12.22. ~ 2016.07.30.

다. 변경사유 : 반포공원 행사기간(유커방문, 서래섬 유채꽃 축제) 및 선행공정인                             토목공사 준공기한 연기에 따른 절대공기 부족

붙     임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 계약의뢰 1부.

3. 계약보증서 1부.

4. 공사계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	06/29 代박병현
협조자
시행	총무과-11096	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)