투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	건설폐기물 처리용역 설계변경(총차2회, 2차 1회) 시행

우리 부에서 시행중인 『용두3 및 신이문 빗물펌프장 신증설공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차2회, 2차1회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

❍ 용 역 명 :   용두3 및 신이문 빗물펌프장 신‧증설공사 건설폐기물처리용역

❍ 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 3,250톤

❍ 용역기간

- 총  차 : 13. 4. 26 ∼ 16. 06. 30

- 2   차 : 15. 6. 18 ∼ 16. 06. 30

❍ 용 역 비 : 79,556,400원(2차 21,905,400원)

❍ 용 역 사 : ㈜보운환경 대표 안영자

□ 변경내용

❍ 총차2회 및 2차1회 설계변경

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총차 (2회)	79,556,400원	113,993,000원	증)34,436,000원
2차 (1회)	21,905,400원	56,342,000원	증)34,436,600원

❍ 설계변경 사유

- 총  차 : 용두 빗물펌프장 증설공사 시행중 폐기물량 증가

→ 폐콘크리트 479톤(증), 폐아스콘 927톤(증)

- 2   차 : 용두 빗물펌프장 증설공사 시행중 폐기물량 증가

→ 폐콘크리트 479톤(증), 폐아스콘 927(증)

❍ 예산 : 도시개발특별회계, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 용두 빗물펌프장 시설용량증대, 시설비(401-01)

붙임  1. 관련 보고서 1부.

2. 변경내역서 각 1부.

3. 합의각서 각 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	노태학		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	06/29 임춘근
협조자
시행	방재시설부-9905	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개