문서번호	수상기획과-432
결재일자	2016.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수상기획과장	운영부장		한강사업본부장
박은희	홍성우	차장운		02/24 황보연
협 조
	주무관		신흥교

수상레포츠 통합센터

타당성 조사 용역 시행계획

2016. 2

한강사업본부

(수상기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	공공관리투자 센터(협의)
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목  차

Ⅰ.	추진배경 및 근거	1
Ⅱ.	사업개요	2
Ⅲ.	타당성 조사 용역 개요	2
Ⅳ.	향후 추진계획	4
	※ 붙임	4

수상레포츠 통합센터 타당성 조사 용역 시행계획

한강 수상이용 활성화를 위한 조정, 카누, 요트 등 수상레포츠의 교육․훈련․체험 및 관련 선박의 계류를 위한 수상레포츠 통합센터 조성의   타당성을 검토하여 사업 추진의 전문 역량을 강화하고자 함

1		추진배경 및 근거

□ 추진배경

○  최근 수상이용 트랜드는 기존 수상영업시설(유람선, 보트 등) 이용보다 개인 레저선박을 이용한 수상레저활동이 꾸준한 증가추세에 있음

- 최근 수상레저 활동은 연간 5~10% 증가 추세

○  필수 기반시설인 교육․훈련장과 공용계류시설이 부족하여 수상레포츠의 보급확산 및 수상이용 활성화 한계

- 한강내 총 60개소의 선착장 중 유선사업 등 개별목적 개인 소유 시설이 대부분(48개소/80%)임

○  증가하는 레저선박의 기반시설 수요충족 및 수상레포츠 이용활성화를 위해 수상레포츠 통합센터 확충 필요

- 수요추정(용역결과) : 390척(’12년) → 21,200척(’20년)

□ 추진근거

○ 2016 신규사업 선정(신규사업 발굴 보고회) : ’15.7월

- 시장단(4) 등 심사위원으로 참여, 신규사업(예산 : 시비 50억)으로 최종 선정

○ ‘16.1.15 행정2부시장 주요 현안사업 보고 결과, 타당성 조사 실시

- 1단계로 타당성 조사를 선행한 후 타당성 조사결과에 따라 2단계 기본설계 시행

2		사 업 개 요

□ 사업개요

○ 위    치 : 난지한강공원

○ 시설규모 : 계류시설(수면 공간 6,000㎡) : 요트,보트,조정,카누 카약 등

통합센터(연면적1,400㎡)  : 3층 규모(교육장, 편의시설 등)

※ 둔치보관장(5,000㎡) : ‘09년 설치 완료 / 활용

○ 사업내용 : 수상레포츠 교육․훈련․체험 및 계류 등 종합 지원시설 조성

○ 조성기간 : 2016. 1월 ~2017. 4월

○ 소요예산 : 50억원(시비 50억, ‘16년 30억, ’17년 20억)

수상레포츠통합센터 조성도	둔치보관장(‘09년 설치완료)

3		타당성조사 용역 개요

□ 개  요

○ 용 역 명 : 수상레포츠 통합센터 조성 타당성 조사

○ 용역목적 : 전문적・과학적 분석으로 사업의 타당성에 대한 객관적 의견 제시

○ 용역기간 : ‘16. 2월 ~ 4월 (계약일로부터 2개월)

○ 소요예산 : 16,476천원(부가세 포함)

- 예산과목 : 시민중심의 한강문화 활성화, 수상레포츠 통합센터 조성, 시설비

○ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항 (2천만원미만 소액)

- 공공투자관리센터에 우선 협의하여 센터 수행 불가시 외부전문기관 의뢰

□ 과업내용

○ 한강공원내 수상레포츠 이용형태 및 시설현황 조사․분석

- 한강 수상을 기반으로 활동하는 수상레포츠 단체, 동호회 등 현황 조사

- 수상레포츠 종목별 이용 수요, 필요 시설 소요 분석 등

○ 통합센터 조성지의 입지적, 수리적 특성 검토

- 한강공원의 입지적, 수리적 특성을 감안한 통합센터 적정부지 검토

- 계류선박 손상․부유쓰레기․동절기 유빙 유입․고속운항 선박의 항주파 방지를

위한 시설 설치시 개략 설치비용 산출

○ 통합센터 필요성, 운영 및 활용에 대한 최적 사업추진 방안 제시

- 통합센터 조성의 필요성(수요) 및 활용에 대한 사업추진 전략 구상

- 수상레포츠별 종목 특성을 고려한 통합센터의 최적 운영 방안 및 기존 한강내          수상시설물과의 운영 차별화 방안 제시

- 통합센터 운영 및 활용 계획 분석을 통한 최적의 사업 규모 제시

○ 비용, 경제성 등에 대한 타당성 분석

- 사업타당성 분석기법, 분석의 전제 및 방법, 사업타당성 분석 결과

- 설치 방법(파일, 앵커)에 따른 건축비, 설계비, 부대비, 운영비 등 사업에 소요

되는 사업비 추정 및 사업기간 분석

※ 공공투자관리센터에서 타당성조사용역을 수행하지 않아, 외부전문기관에서 수행시        공공투자관리센터의 타당성검증을 받아야 하므로, 타당성 검증에 따라 타당성조사         내용의 수정, 변경 있을시 용역업체에서 수용해야 함을 특기사항으로 명시

□ 용역 결과 활용계획

○ 타당성 조사 용역 결과 분석하여 사업추진 근거 마련

- 2단계 투자심사 대비 경제성 확보 방안 검토 및 사업추진 전략 구상

- 기본 및 실시설계 용역 반영

4		향후 추진계획

□ ‘16.2월~5월 : 타당성조사 용역(2개월), 타당성검증(1개월) 진행

□ ‘16.6월~7월 : 기본설계 후 2단계 투자심사 상정

□ ‘16.8월~9월 : 실시설계 및 통합센터 조성공사 발주

붙임 1. 과업지시서 1부.

2. 타당성조사 용역 설계내역서 1부.  끝.