투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(경의선숲길 공원조성공사)

우리 본부에서 시행 중인 『경의선숲길 공원조성공사』의 【준공기한 연기】를    아래와 같이 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사

나. 계약금액 : 14,908,300,000원 (2차 : 7,551,500,000원)

다. 공사기간 : 13.09.30 ~ 16.06.30 (2차 : 14.12.22~16.06.30)

라. 계 약 자 : 한일개발(주) & 고양종합건설(주)

마. 준공기한 연기내역

구 분	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
전체	2013.09.30.~2016.06.30	2013.09.30.~2016.07.31	31일 연장
2차	2014.12.22.~2016.06.30	2014.12.22.~2016.07.31	31일 연장

○ 연기사유 : 와우교 간섭구간 공사지연(마포구 시행), 신수동구간 유출

지하수 활용 개선, 시장 요청사항 처리 등 절대공기 부족

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 1) 준공기한 연기 방침서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	06/30 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-10013	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 14층 방재시설부	/
전화	3708-8684	/전송	3708-8756	/		/	부분공개(6)