투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(남부순환로~오정대로 도로개설)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시도시기반시설본부 설비부-10281(2016.06.30.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사

나. 공사장소 : 강서구 외발산동 메이필드호텔 앞

[T-GIS교차로명 : 공항터미널(메이필드호텔)]

다. 원 인 자 : 서울특별시도시기반시설본부 설비부

라. 감 리 사 : ㈜트래픽스

마. 시 공 사 : ㈜삼구전력

바. 변경내용 및 요청 : 공사기간 변경에 따른 준공기한 연장

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	승인통지일 ~ 2016.06.30.	승인통지일 ~ 2016.08.30.	61일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	홍승찬		기전과장	06/30 박재경
협조자
시행	기전과-8299	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개