문서번호	누수방지과-6743
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이동욱	김영삼	06/30 강신재

배급수관정비공사 추진실적 보고(5월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

상수도사업본부

시설안전부

2016년 5월 배급수관정비공사 추진실적 보고

2016년도 배급수관정비공사 공정관리 등 사업추진이 원활히 진행될 수 있도록 5월 추진실적을 점검하고 보고 드림.

□ 현  황

○ 정비목표 : 75㎞

○ 사 업 비 : 62,000백만원(시설비 : 60,000, 감리비 : 1,994, 시설부대비 : 6)

○ 발주건수 : 31건

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
발주대상 (건수)	31	6	3	5	3	3	4	3	4
정비계획 (㎞)	75	14.5	6.5	10.8	6.9	7.6	11.9	7.2	9.6
사업비 (백만원)	60,000	11,608	5,232	8,665	5,558	6,049	9,482	5,722	7,684

※ 감리비 1,994백만원 및 시설부대비 6백만원 제외

□ 추진실적

○ 5월말 현재 정비실적 : 5.9㎞

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	75	14.5	6.5	10.8	6.9	7.6	11.9	7.2	9.6
전월실적	0	-	-	-	-	-	-	-	-
당월실적	5.9	1.4	0.5	0.2	0.9	1.4	0.5	0.5	0.5
실적누계	5.9	1.4	0.5	0.2	0.9	1.4	0.5	0.5	0.5
정비율(%)	7.9	9.7	7.7	1.9	13.0	18.4	4.2	6.9	5.2

□ 향후계획

○ 단위사업 31건 계약자 선정 완료되어 공사 진행중임.

○ 공사장 안전관리 및 부실시공 예방을 위한 외부 전문가 합동점검 시행.끝.