투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	정로건설(주)
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 준공기한 연기승인 알림(용산역전면2구역)

1. 용산역 2016-001(2016.06.28.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 귀 사에서 시행 중인 『교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사(용산역전면 2구역)』와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기승인하고 알려드리니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사(용산역전면 2구역)

나. 공사장소 : 용산구 용산역전면 2구역 도시환경정비사업 주변

다. 원 인 자 : 정로건설(주)

라. 준공기한 연기승인내역

- 당 초 : 2012.11.01. ~ 2016.6.30.

- 변 경 : 2012.11.01. ~ 2017.12.31.

※ 교통안전시설정보(	T-GIS)에 시설물정보 입력 후 준공 요청

마. 연기사유 : 토목공정 지연으로 인한 절대공기 부족.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
전문관	김진종		기전과장	06/30 양영민
협조자
시행	기전과-7025	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	대시민공개