문서번호	도로보수과-3576
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
한수영		06/30 김준섭
협조

공사기간 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

공사기간 연장검토 보고

《2016년 도로 및 교통부속물 유지보수공사-연간단가》

공사개요

공 사 명 : 2016년 도로 및 교통부속물 유지보수공사-연간단가

규    모 : 중앙분리대 보수 및 설치 50개소, 미끄럼방지시설(그루빙)3,050㎡,  옹벽보수 100㎡, 차선분리대 보수 및 설치 80경간 등

도 급 비 : 328,783천원

공사기간 : 2016. 03. 14 ∼ 2016. 12. 30

시 공 사 : ****************

공사추진현황(제1차 작업지시)

일 자	위 치	공 종	수 량	비 고
6.9	문성로 192앞	반사경설치	1개	완료
6.9	현충로노들고가	텔리네이터	15개	완료
6.9	신림11동768(미성초교앞)	방지턱안내판	2개	완료
6.12	시흥IC	반사경설치	1개	완료
6.12	까치산고개~사당역	텔리네이터	50개	완료
6.12	노량진빗물펌프장	가드레일,지주,경계석	2경간,1본,10개	완료
6.16	신대방성원상떼빌앞	보도정비	40㎡	완료
6.26	시흥동벽산아파트505동앞	표면처리 및 단면보수	45㎡	완료
6.27	장은혜그린아파트앞	균열보수	30m	예정

검토내용

시공사(임펙트디엔씨(주))로부터 장은혜그린아파트앞 옹벽균열보수 사항에 대하여 공사현장 여건이 작업공간 협소로 공사방법의 검토가 필요하다는 의견이 제시됨(관련문서 :IP2016-남부-05호)

위 사항을 검토한바 이면 도로폭이 협소하고, 옹뱍높이(h=5m이상)가 높아 공사를 위한 가시설 설치가 곤란한 실정으로 공사장 안전을 위하여 안전한 공사방법을 강구할 필요가 있어 공사기간의 연장이 필요한 것으로 판단 됨.

(공사기간 연기 : 제1차작업지시)

구 분	당 초	변 경	비 고
공사완료일	2016.06.30	2016.07.10

조치계획

상기와  같이 공사기간을 연장하여 공사현장 안전관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1) 관련문서 1부. 끝.  끝.