출 장 결 과 보 고 서

조사관		시민감사옴부즈만	시민감사팀장	위원장		결재
천진혁		윤천원	박용파	07/01 정기창
협 조
	조사관				강태영

	명에 의하여 동부간선도로확장공사(2공구, 3공구) 현장감시활동 출장결과를 보고 합니다.
2016. 6. 30.
보 고 자 : 시설8급 성명 : 천진혁

보 고 내 용
일 시	2016. 6. 30(수) 14:00 ~ 18:00
건 명	동부간선도로확장공사(2공구,3공구) 현장감시활동 출장 결과보고
내용	○ 출 장 자 : 시민감사옴부즈만 윤천원, 시설8급 천진혁 ○ 출 장 지 : 동부간선도로확장공사(2공구, 3공구) 현장 ○ 사업개요 〈동부간선도로확장공사 2공구〉 - 공사기간 : 2008.12 ~2017.12(준공연기예정:2019.12) - 위 치 : 초안산 근린공원 ~ 상계8동(주공1단지) - 사업규모 : 연장 L=3.2km, 폭원 B=2~6차로→7~8차로 - 총사업비 : 190,400백만원(도급비:16,063백만원) - 시 공 사 : ㈜ 한 라 〈동부간선도로확장공사 3공구〉 - 공사기간 : 2008. 2 ~2017.12 - 위 치 : 상계8동(주공15단지) ~ 의정부 시계 - 사업규모 : 연장 L=2.25km, 폭원 B=4차로→6차로 - 총사업비 : 도급비:62,229백만원 - 시 공 사 : ㈜ 세원건설 ○ 점검내용 - 2016년 공사 진행현황 ·2공구 : 도봉지하차도 공사중(2,990m 중 1,290m 완료) ·3공구 : 장암지하차도 공사중(400m 중 270m 완료), 캔틸레버옹벽 시공 중 - 공사 현장 안전유지상태 점검 - 민원사항 및 처리결과 확인 - 설계변경 사유 및 변경 금액 확인 ○ 점검결과 - 특이사항 없음