문서번호	여의도공원관리사무소-2912
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
김은희	김희태	代김한수	07/01 오진완
협 조

여의도공원 시설물정비공사 설계변경계획

2016.   7.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 시설물정비공사 설계변경계획

여의도공원 시설물정비공사 시행중 현장여건에 따라 발생된 신규 공종에 대해 설계변경 검토내용을 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 여의도공원 시설물정비공사

○ 위    치 : 여의도공원 일대

○ 기    간 : ’16. 5. 11.~7. 9.

○ 내     용 : 데크로드, 조경석 쌓기, 옹벽마감, 지붕캐노피 재설치 등

○ 계약금액 : 금86,288,000원

○ 계 약 자 : 초림조경 대표 장봉진

□ 설계변경 개요

○ 변경내용 및 사유

구 분	설계변경내용	사 유
시설물공	▷ 조경석 쌓기 주변 경관향상을 위한 사이목 식재 ․사이목 식재 : 0m→114m	현장여건 반 영
	▷ 자전거길 노후로 깨진 우수맨홀 교체 ․우수맨홀 설치 : 0개소→10개소	〃
	▷ 데크계단 A type과 B type 단수 변경 ․A type : 4단→5단, B type : 6단→5단	〃
	▷ 기존 조경석과 어울리게 조경석 크기 변경 ․조경석 2목→3목	〃

○ 계약금액 변경

(단위:원)

구 분		공 사 비			비고
총 공 사 비		당 초	변 경	증 감
도급액	공 급 가 액	78,443,637	84,172,728	5,729,091	증
	부가가치세	7,844,363	8,417,272	572,909	증
	계	86,288,000	92,590,000	6,302,000	증

□ 향후계획

○ 상기 검토내용에 따라 설계변경하고 증액된 도급비6,302,000원은 집행 잔액을 활용하고자 함

붙임 : 변경내역서 및 제비율검증 확인서 각 1부.