함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 대한 회신 및 업무지시(역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-6854(2016.06.28)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소가 발주하고 귀 공단에서 감리중인 “역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사”의 실정보고사항에 대하여 아래와 같이 검토결과 통보 및 경계밸브 추가 설치에 대하여 업무지시 하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바라며, 설계변경시 중복사항, 과다사항 등이 없도록 하고 현장지도시 확인내용 및 감독자 증빙자료(시공사진, 설계도서 등)에 따라 정확한 설계변경이 되도록 처리하시기 바랍니다.

가. 실정보고에 대한 검토결과

구 분	현 황 및 문 제 점	공 단 의 견	검토결과
전구간	개나리아파트 사거리에 신호위반 및 과속단속용 검지선(경찰청)이 관부설 구간에 매설되어 있어 검지선 절단이 불가피한 실정임.	검지선 절단에 따른 복구비를 설계에 반영하는 것이 타당하다 사료됨.	교통 검지선 재설치에 대하여는 설계변경시 반영하여 정산 시행할 것.
전구간	설계상 교통신호수가 1인/일으로 설계되어 있으나, 공사구간내 버스정류장, 횡단보도, 이면도로가 산재하여 교통신호수 부족으로 안전사고 우려	보행자 통행 불편 최소화 및 교통사고 방지를 위해 교통 신호수 추가 배치하고 향후 설계변경시 반영하여 정산 처리함이 타당.	보행자 및 차량 안전사고 예방을 위해 교통 신호수 추가 배치하여 안전관리에 만전을 기하고, 향후 설계변경시 반영하여 정산 시행할 것.
3구간	설계상 기존 아스콘 깨끼 두께는 20cm으로 설계되어 있으나, 확인 굴착결과 30cm로 아스콘 깨기 물량 증가	포장두께 증가분에 대해서는 설계변경시 반영하여 정산 처리함이 타당하다고 판단됨.	포장두께 증가분에 대해서는 설계변경시 반영하여 정산 시행할 것.
전구간	당초 설계에는 이탈방지압륜 자재가 신축링스파이크로 되어 있으나, 수도자재사업소에서 볼트스파이크로 출고되어 서로 상이한 실정임.	누수방지과-4696(2016.5.3.)호와 관련하여 이탈방지압륜 접합품을 현장에서 사용되는 이탈방지압륜 규격에 적합하도록 설계에 반영하는 것이 타당하다 사료됨.	이탈방지압륜의 규겨이 통합되어 수도자재사업소에서 출고되는 자재에 맞는 부설품으로 적용하고, 향후 설계변경시 반영하여 정산 시행할 것.

나. 업무 지시(밸브 추가 설치)

- 개나리아파트 사거리의 배수관 D400mm에 단수 민원을 최소화할 수 있도록 경계밸브(D400mm) 1개소 추가 설치

- 설치 위치도

끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	07/01 조상덕
협조자
시행	급수운영과-13103	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개