문서번호	교통운영과-12199
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통개선팀장	교통운영과장
임홍필		이용구	07/01 강진동
협조
	주무관		박평근

서울역주변 교통체계개선공사 모니터링 용역 설계변경 보고

2016.7

도시교통본부

(교통운영과)

설계변경(정산) 보고

서울역주변 교통체계 개선공사 모니터링 용역과 관련하여 전력시설물 설계 제외 등에 따른 설계변경(정산)을 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울역주변 교통체계 개선공사 모니터링 용역

○ 용역규모

- 서울역주변 교통개선공사에 따른 모니터링 및 결과 도출

· 서울역주변 교통개선공사 전·후 8개월간 모니터링 실시

· 분석결과 및 개선방안 도출, 보완공사 반영

○ 용역기간 : 2015.11.16. ~ 2016.7.12

○ 용 역 비 : 110,964,000원

○ 용 역 사 : ㈜건영이앤씨 대표 박준범

□ 설계변경내용                                             (단위 : 원)

구 분	계약금액(당초)	변경금액(변경)	증․감 금액	비 고
1. 모니터링비	62,884,560	62,884,560
직접인건비	19,706,833	19,706,833
직접경비(조사비)	40,507,077	40,507,077
직접경비(인쇄비)	2,670,650	2,670,650
2. 제경비	21,677,516	21,677,411	감105
3. 기술료	8,276,869	8,276,848	감21
4. 전력시설물 설계비	6,554,328	0	감6,554,328
5. 손해배상보험료	574,000	613,000	증39,000
공급가액	99,967,273	93,451,819	감6,515,454
6. 부가가치세	9,996,727	9,345,181	감651,546
7. 설계자문비	1,000,000	0	감1,000,000
총용역비	110,964,000	102,797,000	감8,167,000

□ 설계변경 사유

○ 서울역주변 교통개선공사 모니터링 결과, 전력시설물에 대한 보완공사 대상이 없어 전력시설물 설계비 제외

○ 설계자문 미시행으로 인한 설계자문비 제외, 손해배상보험료 실정산 등에

따른 용역비 감소

□ 조치계획

○ 위 보고 내용대로 아래와 같이 설계변경 정산처리하고자 함

- 당초 계약금액 : 110,964,000원

- 변경 계약금액 : 102,797,000원(감8,167,000원)

첨 부 : 1. 설계변경 요청공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.