문서번호	정수과-3324
결재일자	2016.7.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
권오정		김효상	07/01 최석기
협조

운반시간 감소에 따른

『사업장폐기물 처리용역 』 변경계약 계획

2016. 7.

정수과

운반시간 감소에 따른

사업장폐기물처리용역 변경계약 계획

2016년도 『사업장폐기물 처리용역(단가계약)』과 관련하여 운반시간 감소에 따른 변경계약을 다음과 같이 추진하여 배출수처리 시설에 만전을 하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계약명 : 사업장폐기물(무기성정수슬러지) 처리용역 단가계약(장기계속 사업)

○ 용역기간 : 2016. 6. 16. ~ 2018. 6. 15.

○ 계약상대 :

- 처리업체 : ***********

- 운반업체 : ***************

○ 계약단가(VAT제외)

- 처리단가 : 21,788원/톤

- 운반단가 : 20,918원/톤

○ 계약금액 : 금887,856,700원

구 분	합계	2016년 (6.16.~12.31)	2017년 (1.1~12.31)	2018년 (1.1~6.15)	비고
처리물량	18,900톤	5,550톤	9,450톤	3,900톤
금 액(원)	금887,856,700원	금260,720,130원	금443,927,830원	금183,208,740원

□ 변경계약 사항

○ 처리장소 및 운반시간 감소에 따른 운반비 감액

- 당초(설계) : 충북 단양군 매포읍 매도길246

- 변경(낙찰) : 인천시 서구 검단천로153

○ 처리 및 운반단가 변경내역(VAT제외)

- 처리비 : 21,788원/톤(변동없음)

- 운반비 : (당초) 20,918원/톤 → (변경) 17,738원/톤(감3,180원/톤)

	당초	변경	비고
운반시간	362.4분	183.8분	178.6분 감소

○ 용역비 변경내역

- 총 용역비 : 금821,744,500원(감66,112,200원)

- 1차 용역비 : 금241,306,230원(감19,413,900원)

- 운반비 감소에 따른 계약금액 조정내역                           (단위:원)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비 고
총용역비		887,856,700	821,744,500	-66,112,200
차수별	1차(2016)	260,720,130	241,306,230	-19,413,900
	2차(2017)	443,927,830	410,871,730	-33,056,100
	3차(2018)	183,208,740	169,566,540	-13,642,200

□ 행정 사항

○ 변경사항을 재무과(본청)에 계약(변경)의뢰 코자 함.

첨부 : 1. 합의서 1부.

2. 설계서(총차) 1식.

3. 설계서(1차) 1식.

4. 운반거리설계서(변경)끝.