문서번호	녹지관리과-6103
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
조영곤	강병기	김윤철	07/01 이용태
협 조

서울 한양도성(남산구간) 주변

수목 및 담쟁이 정비공사 추진계획

2016. 6.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울 한양도성(남산구간) 주변

수목 및 담쟁이 정비공사 추진계획

서울 한양도성의 유네스코 세계문화유산 등재 추진과 관련 성곽 주변 수목 및 담쟁이를 정비하여 경관을 향상하고 문화재 훼손을 최소화하고자 함.

□ 추진근거

❍ 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비(한양도성도감-1293, ‘16.2.11.】

□ 사업개요

❍ 위    치 : 한양도성 남산구간(국립극장 ~ 구. 남산식물원)

❍ 사업내용 : 도성 주변 위험 수목 및 담쟁이 제거, 관목류 식재 등

❍ 규    모 : 75,000㎡(L=2.0km)

❍ 기    간 : ‘16. 6. ~ 9.

❍ 총사업비 : 76백만원(공사비70, 설계비6)

- 예산과목 :  문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 수목 및 담쟁이 정비, 시설비및부대비, 시설비

위 치 도

□ 추진방법

❍ 설계용역

- 용역기간 : 착수일로부터 30일간

- 소요예산 : 5,496천원  (* 기술용역 타당성 심사 결과에 따라 금액 조정 예정)

- 계약방법 : 문화재와 조경에 대한 이해도가 높고 다수의 경험이 있는 전문설계업체 중 성실한 업체를 선정하여 수의계약

- 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

❍ 시설공사

- 공사기간 : 착공일로부터 45일간

- 소요예산 : 70,000천원

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 입찰참가자격

․ 문화재 수리 등에 관한 법률 제14조에 의거 전문 문화재수리업(조경)으로 등록한 업체로서

․ 입찰 공고일 전부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일 ) 까지 주된 영업소의 소재지가 서울시에 소재한 업체

□ 사업효과

❍ 성곽 주변 위험수목 정비를 통해 한양도성 보존 및 경관 향상

❍ 성곽에 부착된 담쟁이 제거로 햔양도성 훼손 최소화

□ 향후계획

❍ ‘16. 6.         :  설계용역 발주

❍ ‘16. 7.          :  설계심의 및 용역 준공

❍ ‘16. 8. ~ 9.   :  공사발주 및 시행

붙임 1) 서울한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비계획 1부.

2) 서울한양도성 주변 수목 관리지침 1부. 끝.