문서번호	의정담당관-6960
결재일자	2016.7.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김정수	이문주	정광현		07/04 김경호
협 조

『서소문청사 2층 회의공간, 본관 1층 국민의당    협의회 사무실 재배치 및 리모델링 공사』 감 리 용 역 계 획

2016.  06.

시의회사무처

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『회의공간, 국민의당 협의회 사무실 재배치 및 리모델링 공사 감리용역 』

감 리 용 역 계 획

서울특별시의회에서 추진중인『서소문청사 2층 회의공간, 본관 1층 국민의당 협의회 사무실 재배치 및 리모델링 공사』의 차질없는 시행으로 제269회 서울특별시의회 임시회(2016.08.26.~09.09.) 이전 공사 착공 및 완료하여 원활한 의정활동을 지원하고자 관련규정에 의한 감리용역을 시행하고자 함.

1				사 업 개 요

사 업 명  :『서소문청사 2층 회의공간, 본관 1층 국민의당 협의회               사무실 재배치 및 리모델링 공사』

위    치 - 중구 서소문동 37(서소문청사 2층), 세종대로 125(의회본관 1층)

규    모 - 총면적 285.24㎡, 회의공간 확충 및 노후시설 교체

사업기간 - 2016. 07. 04. ~ 2016. 08. 19.

소요예산

(단위 : 천원)

합 계	공사비	설계비	감리비	비 고
184,880	168,597	13,115	3,168	건축+기계 (관급비28,705)

2				추 진 경 위

2016. 05. 26.  :  설계용역 시행계획 수립

2016. 06. 02.  :  기술용역 타당성 심사결과(기술심사당당관-적정)

2016. 06. 02.  :  설계용역 착수

2016. 06. 22.  :  설계용역 완료

2016. 06. 23.  :  공사발주 시행계획 수립

3				시 행 방 안

분야별(건축․기계) 감리용역 추진

사    유

- 서울특별시의회에서 추진중인『서소문청사 2층 회의공간, 본관 1층 국민의당 협의회 사무실 재배치 및 리모델링 공사 감리용역』의 차질없는 시행으로 제269회 서울특별시의회 임시회(2016.08.26.~09.09.) 이전 공사 착공 및 완료하고,

- 관련 규정에 의하여 용역발주한 설계내역서에 대하여 리모델링 공사경험이 많은 설계자를 참여시켜 전문가·행정의 소통과 협력의 거버넌스로 품질 향상 기대와 의정활동을 적극 지원하고자 함.

※ 관련규정

구 분	설 계	감 리	비 고
건축․기계	건축사법 제4조	건축법 제25조

계약방법 : 수의계약

사    유

- 본 용역은 소액으로서 일반경쟁입찰에 의할 경우 부적격업체 채택 우려가 있어 리모델링공사 등 유사경험이 있는 감리자로 하여금 감리용역을 시행하여

- 서울특별시의회 임시회(2016.08.26.~09.09.) 이전 공사 착공 및 완료하여 과업목적을 달성하고자 함.

- 관련규정

·「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조

·「지방자치단체 수의계약 운영요령」

계약업체

- 업 체 명 : 이도 건축사사무소

- 주    소 : 마포구 월드컵로 14길 28, 401호

- 대 표 자 : 대표 건축사 이재호

4				향후 추진계획

2016. 06. 30.  :  감리용역 발주관련 심사의뢰(기술심사담당관)

2016. 07. 01.  :  감리용역 발주 및 계약

2016. 07. 04. ~ 08. 19.  :  공사착공 및 완료

붙  임  : 1. 설계용역 시행계획 1부.

2. 공사 시행계획 1부. 끝.