서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 계약 의뢰(서울역주변 교통체계개선공사 모니터링 용역)

우리과에서 시행중인 “서울역주변 교통체계개선공사 모니터링 용역“과 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울역주변 교통체계개선공사 모니터링 용역

나. 계약금액 : 110,964,000원

다. 계 약 자 : ㈜건영이앤씨 대표 박준범

라. 계약기간 : 2015.11.16 ~ 2016.7.12

마. 설계변경사항                                             (단위 : 원)

구 분	당초(계약)	설계변경	증․감	비 고
계	110,964,000	102,797,000	감8,167,000

- 전력시설물 설계비 및 설계자문비 제외, 손해배상보험료 실정산에 따라

용역비 감액 발생

바. 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통

및 안전관리 강화, 도로교통소통개선, 시설비(401-01)

붙  임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	교통운영과장
★주무관	임홍필		교통개선팀장	이용구		교통운영과장	07/04 강진동
협조자	주무관	박평근
시행	교통운영과-12314	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관1동 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2467	/전송	02-2133-1053	/	ihp@seoul.go.kr	/	대시민공개