시  민

문서번호	시설관리과-13554
보존기간	년
결재일자	2016.7.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	기전팀장	시설관리과장
정희종	김충완	07/04 代박미영
협 조

『월계배수지 전기케이블 및 배관교체공사』

설계변경 검토보고

2016. 7.

북부수도사업소

시설관리과

『월계배수지 전기케이블 및 배관교체공사』

설계변경 검토보고

우리사업소에서 추진중인“월계배수지 전기케이블 및 배관교체공사”에 대하여 현장여건

변동으로 물량 증․감이 발생됨에 따라 심의위원회를 개최하여 설계내용을 심의하여 설계변경을

시행하고자 함.

□ 공 사 개 요

❍ 건      명 : 월계배수지 전기케이블 및 배관교체공사

❍ 공 사 내 역

·월계배수지 전원 및 제어케이블 교체 1식

·관랑트레이설치공사 1식

·기타전기공사 1식

❍ 설계변경내역

·신규공종 추가(기존관로이용불가에 따른 터파기 및 되메우기 ,케이블표지시트,ELP배관추가)

·보험료(건강,연금,노인장기요양보험료정산) 및 안전관리비정산

❍ 계 약 기 간 : 2016.5.26 ~ 2016.7.8.

❍ 도  급  비 : ***********************************

******************************

❍ 도  급  자 : 태화전기건설공사  대표 안효준

□ 심의회 개최

❍ 심의일정 : 2016년 7월 4일(월) 14:00~14:30

❍ 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

❍ 위 원 장 : 공업6급 김충완

❍ 심 의 자 : 공업7급 정희철, 공업7급 배용우, 공업7급 이상진

□ 심 의 내 용

❍ 계약물량 증·감(변경)에 대한 설계변경 사항

❍ 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

❍ 계약변동 (증․감)수량 단가 낙찰률 적용범위내 적용 적정여부

❍ 기타심사를 위해 필요한 사항 검토 등

□ 설계 금액 변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증 ․ 감액	비고
****	**********	**********	************

□ 설계변경 계약물량 증감현황

구 분	기존	변경	신규공종	증	감	비고
ELP 50mm	0	85	85	85	-	단위m
ELP 65mm	0	127	127	127	-	단위m
케이블표지시트	0	41	41	41	-	단위m
터파기	0	14.76	14.76	14.76	-	단위㎡
되메우기	0	14.76	14.76	14.76	-	단위㎡

□ 행 정 사 항

❍ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고

❍ 심의 검토결과에 의거 설계변경 반영 조치코자 합니다.

첨 부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 심의 신청서 1부.  끝.