준공기한 연기 보고

결재	주무관	시설관리과장
	함인석	07/04 남정열

	명에 의거 담당 구역내 급수공사를 시행하던 중 아래와 같이 준공기한 연기 사항이 있어 보고합니다.
2016. 7.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사보 함인석

보 고 내 용
건 명	준공기한 연기 보고(명일동 312-10번지외 1개소)
내용	1. 위 치 : 명일동 312-11번지(신설 54) 명일동 312-10번지(신설 55) 2. 급수공사 종별 : 신설 3. 보고내용 - 상기 위치에 작업지시 하였으나, 수요가 내부 사정(비계철거지연)으로 인하여 작업일정 조정 요청이 있어 공사를 연기 하는 사항임. 4. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자합니다. ◆ 당초 공사기간 : ’16. 6. 27 ~ 7. 4 ◆ 변경 공사기간 : ’16. 6. 27 ~ 7. 15 6. 지체상환금 부과여부 : 미부과
비 고