음수대 녹물 출수에 따른 전용배관 부설요청 보고

주무관	시설관리과장			결재
김효수	07/04 남정열
협 조
	주무관		함인석

문서번호 :	시설관리과-13668

관내 아리수 음수대 업무수행중 성일초등학교 아리수 음수대에서 녹물출수에 따른 음수대 전용배관 추가연장 요청 민원이 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

◯ 공 사 명 : 한산초등학교외 6개소 아리수 직결음수대 배관설치공사

◯ 공사개요 : D=13~30m,  L=533m

◯ 공사기간 : 2016. 06. 15. ~ 2016. 10. 18

◯ 도 급 비 : 32,746,000원

◯ 계약업체 : 성원종합설비(주)  대표 이창수

□ 보고내용

◯ 아리수 음수대 전용배관 추가 연장 요청에 따른 시공물량 증가

- 학 교 명 : 성일초등학교

- 요청사유 : 보건실 음수대는 건물 내부배관(아연도강관)에 연결되어 있어 음수대에서 녹물출수 되므로 음수대 전용배관을 설치하여 아리수 음수대 설치요청 [성일초등학교-6102(2016.05.30)]

- 공사개요 : D=15mm, L=20m

□ 조치의견

◯ 복도 음수대 전용배관에서 보건실 음수대까지 배관(D=15mm, L=20m)을 부설하여 음수대 녹물출수 민원해소 및 음용률 향상에 기여코자 하며,

◯ 본 공사 계약업체인 성원종합설비(주) 대표 이창수에 작업지시 하고 변경 사항은 추후 설계변경 시 반영코자 함.

붙 임 : 공문사본 1부.  끝.