문서번호	시설과-3361
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
이재미		오삼록	전결 07/04 나병우
협조

- 2016년 박물관 조경 유지관리공사 -

설계변경 시행 계획

2016. 7.

경영지원부

(시설과)

- 2016년 박물관 조경 유지관리공사 -

설계변경 시행 계획

시설과-1815호(2016.4.15.) 및 2614호(2016.5.26.) 관련『박물관 조경 유지관리공사(연간단가)』에 대해서 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명: 2016년 서울역사박물관 조경 유지관리공사(연간단가)

나. 공사내용: 수목,초화,잔디 식재 및 수목 가지치기 등

다. 공사기간: 2016.2.2.~12.10.

라. 도 급 비: 43,569,000원

마. 도 급 자: ㈜범진조경 대표 김범식

2. 설계변경 사항

공 종	규 격	수 량	단위	비 고
소나무(장송) 식재	H8.0*R25	1	주	계약 물량 변경
		3	주
사철나무 식재	H1.0*W0.3	50	주	″
		10	주
남천 식재	H1.0*3가지	50	주	″
		10	주
화살나무 식재	H0.8*W0.4	50	주	″
		10	주
명자나무 식재	H0.8*W0.5	50	주	″
		10	주
회양목 식재	H0.3*W0.3	100	주	″
		100	주
눈주목 식재	H0.3*W0.3	100	주	″
		150	주
산철쭉 식재	H0.3*W0.3	100	주	″
		250	주
자산홍 식재	H0.3*W0.3	100	주	″
		10	주
영산홍 식재	H0.3*W0.3	100	주	″
		10	주
덩굴장미 식재	8㎝포트	50	본	″
		25	본
공 종	규 격	수 량	단위	비 고
비비추 식재	2-3분얼	50	본	계약 물량 변경
		25	본
맥문동 식재	7-10분얼	50	본	″
		1,500	본
소나무(장송) 정밀전정	D20 이하	70	주	″
		20	주
소나무(장송) 정밀전정	D21~30 이하	70	주	″
		20	주
수목 이식	R25~29	5	주	″
		1	주
수목 이식	R30~34	5	주	″
		1	주
관목이식	H0.3~0.7	-	주	신규공종 추가
		100	주
수목제거	B22	-	주	″
		8	주
자갈포설	￠20~50	-	㎡	″
		15.8	㎡
엘브엣지	H125 , I형	-	m	″
		14.8	m
잔디 식재	0.18*0.18*0.02	-	㎡	″
		65	㎡
잔디 식재	0.4*0.6*0.02	-	㎡	″
		35	㎡
마사토 포설	백마사, T100	-	㎡	″
		50.0	㎡
소운반	보통인부	-	식	″
		1	식
운반비	2.5ton 화물차	-	일	″
		1	일
쥐똥나무 식재	H1.2*W0.3	-	주	″
		40	주

가. 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	증 감
도 급 비	43,569,000원	43,569,000원	-

나. 도급비 변경사항: 변경 없음

다. 변경사유: 물량 증감 및 신규 공종 추가사항 발생

3. 검토의견

: 도급비 범위내에서 설계변경(내역변경) 시행하여 공사 목적 달성 및 박물관 조경관리 사업을 원활하게 추진코자 함.

붙임: 1. 설계변경내역서. 1부.

2. 방침서(실정보고서) 2부.  끝.