투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청 (한강공원 이용 안내시설 보수)

1. 우리과에서 시행하는“한강공원 이용 안내시설 보수정비공사”에 소요되는 관급자재에 대하여 납품 기한 연기를 다음과 같이 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 이용 안내시설 보수정비공사

나. 요청내용

품 명	물 품 식별번호	수량	단위	납품요구번호	납품기한 연기		비고
					당초	변경
안내판	22481536	50	개	12-16-2-25074-00	2016.7.4	2016.11.30

2. 연기사유 : 사용시기 미도래.   끝.

	시설관리과장
주무관	최규석		시설관리과장	07/04 한흥태
협조자
시행	시설관리과-1910	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개