문서번호	주거환경개선과-7381
결재일자	2016.7.4.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경정책팀장	주거환경개선과장
배재식		곽석권	07/04 박경서
협조

행촌공터 3호점 신축공사

관급자재 매입 변경 추진계획

2016.  7.

주거환경개선과

행촌공터 3호점 신축공사

관급자재 매입 변경 추진계획

「행촌권 성곽마을 재생사업」과 관련 행촌공터 3호점 신축공사에 필요한 관급자재를 일부 변경 매입하여 공사에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 행촌공터 3호점 신축공사 추진계획(‘16.4.12)

○ 행촌공터 3호점 신축공사 관급자재 매입 추진계획(‘16.5.17)

- 이중단열커튼월, 냉난방시스템 매입
○ 관급자재 발주 변경 요청(‘16.7.4. 종로구(감독기관) →  주거환경개선과)

Ⅱ		공사개요

○ 공사명 : 행촌공터 3호점 신축공사

○ 공사기간 :‘16.5.9 ~ 7.7

○ 공사금액 : 451,884,800원

- 도급액 : 305,391,800, 관급자재 : 146,493,000원

○ 공사업체 : ㈜리버티건설(대표 예장택)

※ 현 공정율 : 약 70%

Ⅲ		매입변경계획

○ 변경내용

(단위 : 원)

매입자재	당초	변경	비고
이중단열커튼월	83,047,080	83,047,080	변경없음
냉난방시스템	4way 4대 12,674,810	4way 2대, 직립형 1대 13,629,970	증 955,160
합 계	95,721,890	96,677,050

○ 변경사유 : 건물 사용여건 및 다목적 이용으로 인한 냉난방 부하증가

○ 소요예산 : 96,677천원

○ 예산과목 : 도시재생본부 주거환경개선과, 평생살고싶은 마을만들기 추진, 주거지재생사업추진(도정), 성곽마을보전관리, 시설비

○ 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

Ⅳ		향후계획

○‘16.7. 4  : 기 매입요청 자재 취소 및 신규 구매계약 의뢰

○‘16.7.10  : 관급자재 설치

붙임  관급자재 발주 변경 요청 공문 일체.  끝.