문서번호	건축부-8730
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		건축관리과장	건축부장
현승주		곽동호	07/05 김진용
협 조
	주무관			최영우
	주무관			강철규
	주무관			송석범
	주무관			유영선
	주무관			윤대영

양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사

예비준공검사 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사

예 비 준 공 검 사  시 행 계 획

우리 본부에서 추진중인『양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사』와 관련하여 준공 전 내·외부 시설공사 마감상태 등을 사전 점검하여 준공일정 및 인계·인수 준비에 차질이 없도록 유지관리부서와 합동점검을 실시하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사

○ 건축규모 : 지하3층, 지상3층, 연면적 5,841.52㎡

○ 공사기간 : 2014.12.12 ~ 2016.7. 21

○ 계약금액 : 총 8,469백만원(관급자재비 제외)

- 건축․토목․조경 4,922백만원, 기계․전기․통신 3,547백만원

○ 시 공 자 : 건축․토목․조경-월계종합건설(주), 기계-라신산업(주)

전기-유진전기, 통신-(주)네오티스

○ 감 리 자 : (주)엄앤드이종합건축사사무소 외1개사

○ 현 공 정 : 내부마감공사(공정률 : 97%)

관련근거

○ 건설공사 예비준공검사 전면 실시(행정 2부시장 방침 제316호, 2012.9.25)

- 예비준공검사 시행기관 : 발주부서 주관으로 유지관리부서와 합동점검 실시

○ 예비준공검사 실시 개선대책(행정 2부시장 방침 제27호, 2014.2.6)

- 계약금액 10억원이상 공사, 외부전문가 합동점검 실시

예비준공검사 실시계획

○ 일   시 : 2016.7.8(금) 15:00

○ 장   소 : 양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사 현장

○ 점 검 자(분야별 합동점검)

- 외부위원 : 유병학(시공기술자, 설계변경 자문위원)

- 도시기반시설본부

구 분	건 축 부	방재시설부	설 비 부
점검분야	건축, 토목	조 경	기계, 전기, 통신, 소방
점 검 자	현승주, 강철규	송석범	윤대영, 유영선

- 자원순환과(사업의뢰부서) 등

○ 주요 점검내용

- 공사 내용중 미비한 사항 사전 보완

- 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검

- 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검 등

행정사항

○ 외부위원 수당지급
- 지급수당 : 150,000원
※ 산출근거 = 참석수당 100,000원 + 사전검토비용 50,000원
- 예산과목 : 기후환경본부 자원순환과, 효율적인 폐기물처리, 안정적인

폐기물처리, 양천자원회수시설 주민편익시설 증축, 시설부대비
- 지출방법 : 개별계좌입금

향후계획

○ 2016. 7.21 : 지적사항에 대한 보완조치 완료 후 준공
○ 2016. 8월 : 건설사업관리단 준공검사, 시설물 인계․인수 추진

붙임 : 예비준공검사 주요점검표 등 각1부.  끝.