문서번호	설비부-10620
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		김창균	07/05 권오식
협조

한양도성 낙산구간 통합관제센터 구축

설계변경 실정 보고사항 검토 보고

2016. 07.

도시기반시설본부

(설비부)

한양도성 낙산구간 통합관제센터 구축

설계변경 실정 보고사항 검토 보고

「한양도성 낙산구간 통합관제센터 구축공사」설계변경 실정보고 사항에 관하여 검토하고 보고 드림.

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 한양도성 낙산구간 통합관제센터 구축

❍ 위    치 : 서울특별시 종로구 낙산성곽길 일대

❍ 사업규모 : 통합관제센터(서울디자인재단 6층, 244㎡)

CCTV 카메라 75개소(낙산성곽길 2.2㎞)

❍ 사업기간 : 2016. 5.24. ~ 2016. 9.30.

❍ 사 업 비 : 2,184백만원(도급 764,  관급 1,420)

2		관련근거

❍ 설계변경 실정보고(부광감 16-70101,  ‘16.7.1.)

- 통합관제센터내 바닥타일 등 마감공사 물량 변경

3		변경내용

연번	구 분	당 초	변 경	소요예산 (천원)
	계			증)7,100
1	관제센터 출입문 위치	관제센터 내부에 소화전(기시설) 배치	출입문 위치를 변경하여 관제센터 바깥쪽으로 소화전 배치(소방법 적용)	-

연번	공 종	변경내용		소요예산 (천원)
		당 초	변 경
2	비상탈출구(창호)	관제센터내 비상 탈출구(창호) 폐쇄	비상탈출구 존치(소방법 적용)	감)400
3	관제센터 바닥 타일 (91㎡)	미 교체	전면교체 (관제센터 재구획과 기존타일 노후 등에 따른 환경개선을 위해 전면교체)	증)4,000
4	사무공간 도색 (190㎡)	미 시공	회의실 및 사무공간의 석고보드 도색 (벽체 노후에 따른 환경개선)	증)2,000
5	UPS축전지	축전지용 판넬설치	축전지 하중 분산(1,115㎏ → 322㎏)/㎡을 위해 베이스 추가 제작설치	증)1,500

❍ 감리의견

- 안전 및 시공품질 확보를 위해 상기 사항에 대한 설계변경이 필요함

〈관련사진〉

출입문 위치 변경 (소화전 기능유지)	비상탈출구
관제센터 바닥 (타일 교체)	사무공간 도색

4		조치계획

❍ 현장여건 반영과 통합관제센터 환경개선을 위해 설계변경이 필요한 바, 실정보고 사항을 승인하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 감리 실정보고서 1부.  끝.