문서번호	도로관리과-10469
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로포장안전팀장	도로관리과장
이옥휘	임영철	07/05 배광환

2016년 상반기 친환경포장 추진실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.7

안전총괄본부

(도로관리과)

2016년 상반기 친환경포장 추진실적 보고

교통소음 저감, 포장도로 수명 향상, 폐아스콘 재활용 등 친환경적인 도로포장을 실시하고 상반기 실적을 보고함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.1. ~ 2016.12.(상반기 : ‘16.6.30)

○ 추진내용

- 버스정류장, 중앙버스전용차로 등 중차량 통행구간 SMA, 개질아스콘 포장으로 내구성 향상(도로수명 향상)

- 친환경 재생 아스콘 포장으로 자원 절약 및 환경보호

- 소음감소 및 교통사고 저감을 위한 저소음·배수성 포장으로 도로환경 개선

․간선도로변 집단주택가, 학교, 병원 주변지역 등 방음벽 철치곤란 지역 시행

□ 추진실적

○ 추진목표 : 3,000a(상반기 800a)

○ 추진실적 : 51a

구 분	소 계	동부	서부	남북	북부	성동	강서	비고
추진목표(a)	3,000	780	240	580	700	560	140
추진실적(a)	51	-	-	51	-	-	-

- 세부추진 실적 : 별첨참조

□ 부진사유 및 대책

○ 부진사유 : 아스콘 구매 유찰 및 선정시험 등 사전절차 이행기간 소요로 실착공 지연

○ 분석결과

- 노후포장도로 정비공사가 6월 이후 실착공되어 상반기 추진실적이 부진 하였으나, 추진기간이 12월로 목표달성에 문제가 없을것으로 사료됨.

-  노후포장도로 정비공사 실착공 현황(예정)

구 분	동부	서부	남북	북부	성동	강서	비고
실착공(예정)	6월말	7월중순	6월중순	7월중순	6월말	7월중순

○ 대  책 : 도로사업소에 친환경 아스콘포장(재생, 개질, SMA, 저소음) 추진독려(공문발송)로 목표달성

□ 행정사항

○ 2016년 상반기 성과관리계획 추진실적 제출(16.7.5)

○ 친환경 아스콘포장(재생, 개질, SMA, 저소음) 추진 독려(‘16.7.6)

붙 임 : 2016년 상반기 친환경 도로포장 추진실적 1부. 끝.