함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(월계배수지 전기케이블 및 배관교체공사)

우리사업소에서 시행중인 『월계배수지 전기케이블 및 배관교체공사』건에   대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 계약의뢰합니다.

가. 건    명 : 월계배수지 전기케이블 및 배관교체공사

나. 계약업체 : ***************

다. 계약기간 : 2016.5.26 ~ 2016.7.8

라. 변경내역

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감액(원)	비고
계약금액	**********	**********	**********

마. 설계변경 사유 : 신규공정 증․감 사항 발생 및 보험료 및 안전관리비 정산

바. 예 산 과 목

- 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비(22101)

붙임 : 1. 설계변경 심의 결정서 1부.

2. 설계변경내역서 및 합의서1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	정희종		기전팀장	김충완		시설관리과장	07/06 代박미영
협조자
시행	시설관리과-13783	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02)3146-3417	/전송	02)3146-3439	/	chpdchpd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)