투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경(총차 및 1차 1회)계약 의뢰(강남순환 8공구 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「강남순환도시고속도로 8공구 전기공사』 와 관련, 아래와 같이 설계변경(총차 및 1차 1회) 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 전기공사(총차 및 1차)

2. 공사금액 : 총차3,691,125,300원(1차-555,000천원)

3. 시 공 사 : (주)광성기업외1개사

4. 공사기간 : 2016.2.17.~2018.7.31.(1차 ~ 2016.7.15.)

5. 설계변경 내용

구 분	공사기간		증‧감	비고
	당초	변경
총 차	*************	*************	**********
1 차	***********	***********	***********

6. 변경사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 내역 변경 및 현장여건을 반영한 일부공종 추가 반영

따로붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	유병기		설비부장	07/06 권오식
협조자	주무관	김석기
시행	설비부-10679	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)