투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사)

1. 시설보수과-2065(2016.06.30.)호와 관련 『2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사』 건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결되었음을 알려드립니다.

가. 건       명 : 2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사

나. 최초계약 체결일 : 2016. 05. 04

다. 변경계약체결일 : 2016. 07. 05

라. 계 약 업 체 : ㈜승일토건  대표 박영온

마. 변경전계약금액 : 금2,088,728,000원(금이십억팔천팔백칠십이만팔천원)

,    변경후계약금액 : 금2,335,300,000원(금이십삼억삼천오백삼십만원)

(증액 : 금246,572,000원)

바. 변경전 준공기한 : 2016. 12. 04(변동없음)

사. 변 경 사 유 : (내역서 참조)

붙임 : 1. 공사변경계약 체결통보서 1부.

; 2. 설계변경 합의각서 1부.(변경내역 포함)  끝.

	관리과장
주무관	지두연		관리과장	07/06 김웅남
협조자
시행	관리과-6207	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/
전화	02)300-8516	/전송	02)300-8518	/	nanji71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)