투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약-한강공원 이용 안내시설 보수정비공사

1. 시설관리과-1910(2016.7.4.)호와 관련 입니다.

2. 시설관리과에서 시행중인 “한강공원 이용 안내시설 보수정비공사”에 소요되는 관급자재에 대하여 납품 기한 변경계약을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 이용 안내시설 보수정비공사

나. 요청내용

품 명	물 품 식별번호	수량	단위	납품요구번호	납품기한 연기		비고
					당초	변경
안내판	22481536	50	개	12-16-2-25074-00	2016.7.4	2016.11.30

2. 연기사유 : 사용시기 미도래

첨부 변경요청 내역 1부. 끝.

주무관	이규옥		총무과장	07/06 박병현
협조자
시행	총무과-11704	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개