투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울도서관
수신	내부결재
(경유)
제목	계약 변경 의뢰(헌책보물섬 조성사업 리모델링 설계용역)

1. 행정지원과-5835호(2016.6.28)와 관련입니다.

2. 헌책보물섬 조성사업 리모델링 설계용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하여 사업추진코자 합니다.

가. 계약건명 : 헌책보물섬 조성사업 리모델링 설계용역

나. 계약금액 : 증)9,380,860원

- 당초 : 93,973,930원

- 변경 : 103,354,800원

다. 계약기간 :15일 연장

- 당초 : ‘16.3.14. ~ ’16.7.11.

- 변경 : ‘16.3.14. ~ ’16.7.26.

라. 계약업체 : 변경없음

- 업체명 : ㈜삼정이엔씨 건축사사무소 외 1

- 업체주소 : 서울시 노원구 노원로 248(하계동)

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 과업내용서(변경) 1부.

3. 설계내역서(변경) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	최문환		행정지원과장	박수정		서울도서관장	07/06 이용훈
협조자
시행	행정지원과-6142	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울도서관 4층	/
전화	02-2133-0212	/전송	02-2133-0390	/	moonan321@seoul.go.kr	/	부분공개(5)