등록번호

푸른도시과-12434

주무관

자연생태팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

등록일자

2016.7.6.

정원석

김종철

양종수

07/06

이경우

결재일자

2016.7.6.

공개구분

대시민공개

협  조

아름다운 변화 열린구정 행복도시 서대문

준공기한 연기 보고

[2016년 산사태 예방 사방공사(홍은동 산11-54 등 3개소)]

서 대 문 구

푸른도시과

준공기한 연기 보고

[2016년 산사태 예방 사방공사(홍은동 산11-54 등 3개소)]

「2016년 산사태 예방 사방공사(홍은동 산11-54 등 3개소)」 시행 중 사면 안정성 검토 결과 불안정 판정이 되어 사면 안정화를 위한 사면 토공량 변경과 잦은 우기로 인해 시일이 과다 소요됨에 따라 준공기한 연기가 불가피하여 연기코자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

▢ 공 사 명 : 2016년 산사태 예방 사방공사(홍은동 산11-54 등3개소)

▢ 공사기간 : 2016년 03월 31일 ∼ 2016년 7월 08일

▢ 계약금액 : 금214,359,000원(금이억일천사백삼십오만구천원)

▢ 도 급 자 : ㈜한국산림공사 대표 김은숙

Ⅱ		변 경 내 용

▢ 준공기한 연기

공 사 명	변경사항(준공기한)		비고
	당초	변경
2016년 산사태 예방 사방공사 (홍은동 산11-54 등3개소)	2016.07.08	2016.07.23	15일 연장

▢ 변경사유

- 사면 안정성 검토 실시 결과 불안정하다 판단되어 사면 안정화를 위한

토공량 변경과 그에 따른 사면 안정성 재검토 기한이 필요함.

- 공사기간 중 잦은 강우 일수로 절대공기가 부족하였음.

· 일 강우량 10mm이상 : 13일

· 일 강우량 10mm이하 : 11일

· 사면 토공작업       : 3일

· 사면 안정성 재검토  : 6일

Ⅲ		조 치 계 획

▢ 2016년 산사태 예방 사방공사(홍은동 산11-54등 3개소) 준공기한을 연기하여 공사시공에 만전을 기하고자 함   끝.