문서번호	도로시설과-8135
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장		안전총괄관
박용화	이앙식	송상영		07/07 이택근
협 조	기전시설팀장		김호성
	시설기술팀장		이상호

『서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사』

시설물 인계․인수 검토보고

2016.07

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울시설공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

「시설물 인계․인수」 추진 보고

우리시 도시기반시설본부에서 시행한「서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사」와 관련하여 공사구간 내 설치된 시설물(도로, 도로시설물 등)에 대한 인계인수 추진 보고임.

Ⅰ. 추진개요

❍ 사업개요

- 사 업 명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

- 공사구간 : 강변북로 반포대교~한남대교 구간

- 공사규모 : 고가철거 및 신설 L=753m

· 고가설치 405m, 기존고가 보수보강 140m, 옹벽설치 208m

- 공사기간 : 2011.01.06. ~ 2016.04.30

- 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부

- 시공/감리 : ㈜흥화 외 1개사/㈜한국종합기술 외 1개사

- 위치도 및 평면도(도로시설과 인수대상 구간)

❍ 인수시설현황

- 인계/인수 : 도시기반시설본부 토목부/안전총괄본부 도로시설과(시설관리공단)

- 시설물 현황 : 도로 등 31종 시설물(붙임 1)

시설구분	공정수	주요공정	비고
총 계	31
도 로	2	아스콘 포장, PCMC 포장
도로시설물	1	ST.BOX교
도로부속물	12	방호벽, 보강토옹벽, 신축이음, 교량받침 등
교통관리시설	2	차선, 안내표지판
교통안전시설	1	교통표지판
교통안전 도로부속물	4	데리네이터, 도로표지병, 갈매기표지판 등
기전시설	9	가로등, 내부점검등, 경관조명, 분전반 등

Ⅱ. 추진경위

❍ ‘16.03.03.~05.25 : 인수전 점검 및 지적사항 보완요청(4회)

❍ ‘16.06.09. : 지적사항 조치결과 알림(도시기반시설본부→도로시설과)

❍ ‘16.06.29. : 조치사항 점검결과 알림(서울시설관리공단→도로시설과)

Ⅲ. 검토의견

❍ 도로시설과 인수구간 점검결과 지적사항 조치 완료

주요 지적사항	지적사항			비고
	총계	조치	미조치
총계	70	70	0
‣ 포장불량 및 미포장 구간 포장요청	3	3	0
‣ 방호울타리, 난간, 배수시설 등 부속시설물 보완	11	11	0
‣ 점검사다리, 점검통로 등 점검관련 시설물 보완	8	8	0
‣ 차선 및 구조물, 강재, 외장재 재도장 요청	8	8	0
‣ 신축이음장치 파손, 이격 등 상태 불량	9	9	0
‣ 구조물 균열, 파손 등에 따른 단면보수 등 구조물 정비	16	16	0
‣ 배수로 준설, 폐자제 정리 등 환경정리 미흡	11	11	0
‣ 기전시설 부점등, 분전반 관련 구조검토 등	4	4	0

❍ 합동점검에 따른 지적사항(총 70건) 확인결과 인수인계를 위한 도로, 도로시설물, 부속시설물 등의 조치가 완료됨에 따라 인수인계를 실시하고자 함.

Ⅳ. 행정사항

❍ 2016.07.05. : 인수인계 방침 하달(도로시설과→시설관리공단)

❍ 2016.07.     : 인수인계 실시(도시기반시설본부→시설관리공단)

붙임 : 1. 위치도 및 시설물 현황도 1부.

2. 인수 대상시설물 현황 1부.

3. 시설물 인계인수서 1부.  끝.