문서번호	보행정책과-207
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	보행시설팀장	보행정책과장
이석연	박찬규	전결 07/07 이방일

「교통약자를 위한 무장애 보행환경 조성 기본 및 실시설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

2016.  7.

도시교통본부

(보행정책과)

준공기한 연기 검토 보고

□ 관련근거

○ 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제324호, 2010.7.26.)

- 제7절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지, 제2조 계약기간의 연장

○ 과업내용서 : 제1장 일반사항 14조(과업내용 변경)

- 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 교통약자를 위한 무장애 보행환경 조성 기본 및 실시설계

○ 계 약 자 : ㈜동일기술공사 대표 김수보

○ 계약금액 : 금육천구십만원정(￦60,900,000)

○ 계약일자 : 2016년  4월 12일

○ 착수일자 : 2015년  4월 12일

○ 준공기한 : 2016년  7월 12일

□ 과업내용

○ 교통약자를 위한 무장애 보행환경 조성 기본 및 실시설계

- 서울정문학교, 성동노인복지관 일대 교통약자를 위한 보행환경 개선안 설계용역

□ 추진현황

○ ’16. 4. 12.	: 용역착수

○ ’16. 6. 10.	: 자문위원 현장 점검 시행

○ ’16. 6. 27.	: 실제 교통약자(장애인, 노인 등) 현장점검 시행

○ ’16. 6. 28. ~	: 관계기관 협의 및 실시설계

□ 준공기한 연기내용

○ 연기 준공기한

- 당초 : 2016.7.12.

- 변경 : 2016.8.12.

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 횡단보도 위치 조정 관련 규제심의 등 서울지방경찰청과의 협의 지연되었으며, 향후 보도환경개선과에서 시행하는 설계지도 점검 및 보완 등을 고려하여 준공기한 연기 필요

□ 향후계획

○ 준공기한 연기의뢰

- 재무과 변경계약 요청

○ 계약상대자(㈜동일기술공사)에게 통보하여 용역수행에 차질이 없도록 조치