문서번호	총무과-23342
결재일자	2016.7.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	총무과장
채충일	임철수	07/07 정상택

『2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)』

제1차 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  7.

행  정  국

(총무과)

『2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)』

제1차 설계변경 검토보고

2016년도 청사 기계설비 유지보수 연간단가공사 시행 중 우선

시공에 따른 물량증감과 신규비목 증가로 설계변경을 시행코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : ‘16.2.12 ~ 12.31

○ 계약금액 : 금220,229,850원(금이억이천이십이만구천팔백오십원)

○ 계약업체 : ㈜금정엔지니어링,  박종화

○ 계약내용 : 청사 기계설비 일상 유지관리를 위한 679개 품목

□ 변경내용

○ 금액변경 : 없음

구분		금액(원)			비고
		당초	변경	증감액
총 공사비		220,229,850	220,229,850	0
도급비	공급가액	200,208,955	200,208,955	0
	부가가치세	20,020,895	20,020,895	0
	계	220,229,850	220,229,850	0

○ 물량증감 및 신규비목

- 본 공사는 시청사 기계설비 유지보수공사를 시행하기 위해 679개

품목을 연간단가계약으로 체결한 공사로써,

- 공사시행 중 물량증감과 16개 신규비목이 발생됨에 따라 당초 계약

물량의 조정 및 신규비목을 추가하여 계약코자 함

□ 검토내용

○ 검토대상 : 설계변경으로 인한 계약내용 변경

- 물량증감, 신규비목, 건강보험 및 연금보험 등

○ 적용법규 : 행정안전부 예규 제23호(‘15.7.20 시행)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약일반조건

제7절 계약금액의 조정

· 물량증감 : 증감된 공사량의 단가는 계약단가 적용

· 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을

곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

· 건강보험, 연금보험 등 : 지방자치단체입찰및계약집행 기준 적용

○ 검토결과

- 물량증감 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한                    금액 적용

- 건강보험 및 연금보험 : 공사준공 전에 정산

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 당초 계약금액 내에서 설계변경을 시행하고,

○ 계약변경 후 1차 기성의 준공정산을 시행하여 청사 기계설비유지

관리 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 변경내역서(물량확인서 포함) 1부.

2. 합의서 1부. 끝.