문서번호	건축부-8857
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
권기용		조영수	07/07 김진용
협 조

서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수공사

예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시기반시설본부

건 축 부

서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수공사

예 비 준 공 검 사  시 행 계 획

『서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수공사』 준공 전 유지관리부서(운영자)와 합동점검을 실시하여 준공일정 및 인계·인수 준비에 차질이 없도록 조치고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 서울혁신파크 중소규모 건축물 개보수공사

○ 건축규모 : 1,5,7,16,19,21동 18,942㎡ 개보수

○ 공사기간 : 2015.12.30 ~ 2016.7. 27

○ 계약금액 : 총 3,770백만원(관급자재비 포함)

- 건축․토목․조경 2,152백만원, 기계․전기․통신 1,618백만원

○ 시 공 자 : 서일종합건설(주)

○ 현 공 정 : 잔손보기(공정률 : 99%)

관련근거

○ 건설공사 예비준공검사 전면 실시(행정 2부시장 방침 제316호, 2012.9.25)

- 예비준공검사 시행기관 : 발주부서 주관으로 유지관리부서와 합동점검 실시

○ 예비준공검사 실시 개선대책(행정 2부시장 방침 제27호, 2014.2.6)

- 계약금액 10억원이상 공사, 외부전문가 합동점검 실시

예비준공검사 실시계획

○ 일   시 : 2016.7.12(화) 15:00

○ 점 검 자(분야별 합동점검)

- 외부위원 : 양동종(시공기술자, 설계변경 자문위원)

- 사업의뢰부서(사회혁신담당관) 시설담당

- 운영자(서울혁신센터) 시설담당

- 도시기반시설본부 : 건축부, 설비부 담당

○ 주요 점검내용

- 공사 내용중 미비한 사항 사전 보완

- 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검

- 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검 등

행정사항

○ 외부위원 수당지급
- 지급수당 : 150,000원
※ 산출근거 = 참석수당 100,000원 + 사전검토비용 50,000원

- 예산과목 : 사회혁신담당관, 사회문제 해결을 위한 사회혁신 의제 발굴

실행, 사회혁신 기반조성 및 성과확산, 서울혁신파크 조성사

업,시설부대비

- 지출방법 : 개별계좌입금

향후계획

○ 2016. 7.27 : 지적사항에 대한 보완조치 완료 후 준공
○ 2016. 8월 : 준공검사, 시설물 인계․인수 추진

붙임 : 예비준공검사 주요점검표 등 각1부.  끝.