문서번호	정수시설과-5059
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김우승		代이해승	07/07 차윤기
협 조

천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수!

2016년 토목, 건축 시설물 유지보수공사(연간단가)3차완료및설계변경

보고(3차기성)

2016. 7.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 3차완료 및 설계변경보고 (3차기성)

우리 정수센터 『2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)』 3차 작업물량에 대하여 공사현장 시공상태 확인점검결과 설계도서와 같이 완료되어 3차작업 검사결과를 다음과 같이 보고함.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : 2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2016.02.29 ~ 2016.11.30

공사내용 : 콘크리트 균열보수 250m, 벤치플륨관설치 10m, 하수관 설치 10m, 석축보수 99.6㎡ 등

계약업체 : 정윤산업(주) 대표 정우연,오혜옥

계약금액 : 69,227,150원

Ⅱ				3차 작업완료결과

주요공사 현황

연번	공 종	단위	수 량			비 고
			지시물량	완료물량	정산물량
1	약품동(1층)바닥정비보수 경계석 및 빗물받이보수	㎥ 식	28.5 1	28.5 1	28.5 1
2	본관앞 화강석정비보수 본관뒤 바닥정비보수	㎡ ㎥	16.5 24.05	16.5 24.05	16.5 24.05
3	정수지3지 맨홀정비보수	식	1	1	1
4	주방벽면 및 자하사워실 타일보수	㎥	5	5	5
5	회수조옆 바닥정비보수	㎥	15.4	15.4	15.4
6	유지관리실옆 벽면보수	㎥	37	37	37
7	여과지옆 수로측구보수	㎥	2.4	2.4	2.4

]

주요공종 시공사진

약품동 바닥정비 공사전	본관앞 화강석바닥 공사전	정수지3지 맨홀정비 공사전
약품동 바닥정비 공사후	본관앞 화강석바닥 공사후	정수지3지 맨홀정비 공사후

공사 확인점검 결과

○ 점검대상 : 3차기성 물량

○ 점검일시 : 2016. 07. 07(목)

○ 점검방법 : 공종별 시공상태 전수점검

○ 점검내용

연번	점 검 위 치	공 사 내 용	기성수량	시공 적정성
1	약품동(1층)바닥정비보수 경계석 및 빗물받이보수	단면보수및콘크리트타설 경계석및빗물받이보수	28.5 1	적 정
2	본관앞 화강석정비보수 본관뒤 바닥정비보수	화강석깔기및보수 표면및바닥보수	16.5 24.05	적 정
3	정수지3지 맨홀정비보수	맨홀방수보수	1식	적 정
4	주방벽면 및 자하사워실 타일보수	타일보수	5	적 정
5	회수조옆 바닥정비보수	콘크리트타설	15.4	적 정
6	유지관리실옆 벽면보수	표면보수	37	적 정
7	여과지옆 수로측구보수	콘크리트타설	2.4	적 정

○ 입회확인자 : 지방시설서기보 서한빈

○ 점 검 결 과 : 2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사 3  작업물량 시공상태               적정여부 확인결과 설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

Ⅲ				처리의견

수량변경된 물량을  설계변경하여 기성준공시 일괄하여 정산을 시행코자 함

3차작업 완료공사 물량 및 추가변경물량을 설계변경하여 기성준공 및 기성금 지급

공사현장에 대한 공종별 시공상태 점검결과 시공상태가 양호하다고 판단되어 기성준공 처리하고 제3차 기성금을 지급코자 함.

Ⅳ				행정사항

3차 작업물량 추가물량 변동사항은 추후 누적물량 설계반영 변경 시행

3차작업 완료분 기성준공검사 실시

붙 임 :  1. 현장점검 사진 1부

2. 토목시설물보수 현황사진 1부

3. 작업완료보고서 1부.  끝.