문서번호	시설과-2630
결재일자	2016.7.7.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
채민수	이기석	임병국		07/07 오진완
협 조
	총무팀장		정언룡

『월드컵공원 분전반 7면 제작구매』

계약변경 검토보고

2016. 7.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『월드컵공원 분전반 7면 제작구매』

계약변경 검토보고

노후분전반 교체를 위한 『월드컵공원 분전반 7면 제작구매』시행 중 물량변동 사유 발생에 따른 계약변경 검토보고 임

□ 개    요

□ 건    명 : 월드컵공원 분전반 7면 제작구매

□ 계약금액 : 금30,000천원

□ 계약업체 : 한국전기공업협동조합

□ 납품기간 : `16. 6. 2. ~ 8. 1.(60일간)

□ 변경사유 : 현장실측 반영에 따른 물량변동

□ 주요 변경내용

□『월드컵공원 공원조명시스템 구매설치』에 따른 분전반 1면(평화의공원 방송실)

사업대상 중복으로 감액

□ 분전반 도어제작 및 무선점멸기 각2개 신설 등(모험놀이터, 연못매점 화장실)

□ 설계변경 금액 : 금260,700원 증가

공 사 비		금 액		증·감		비 고
		당 초	변 경
총 금 액		30,000,000원	30,260,700원	증	260,700원
구분	공급가액	27,272,727원	27,509,727원	증	237,000원
	부가가치세	2,727,273원	2,750,973원	증	23,700원
	합 계	30,000,000원	30,260,700원	증	260,700원

□ 검토의견

○ 상기 설계변경 사항에 대하여 조달청에 계약변경 요청하여 시행하고자 함.

붙임 : 변경내역서 1부.  끝.