투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	양천주민편익시설 증축 및 리모델링 전기공사 계약변경 의뢰(총차, 3차수)

우리본부에서 추진중인『양천주민편익시설 증축 및 리모델링 전기공사』와 관련 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 계약변경(총차, 3차수)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 양천주민편익시설 증축 및 리모델링 전기공사

2. 공사기간 : 총차 2014. 12. 15 ~ 2016. 07. 21

3 차 2016. 01. 06 ~ 2016. 07. 21

3. 계 약 자 : 유진전기 대표 전삼영

4. 설계변경 내역

가. 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	총 차	964,753,960	958,912,620	감 5,841,070
	1차	100,000,000	100,000,000		‘15.10.05 기 준공
	2차	160,000,000	160,000,000		‘15.12.04 기 준공
	3차	704,753,960	698,912,620	감 5,841,070	내역조정 및 보험료 정산

나. 변경사유

- 물량정산에 따른 내역변경

- 산업안전보건관리비 및 보험료 등 정산

5. 예산과목 : 기후환경본부 자원순환과, 효율적인 폐기물관리, 안정적인폐기물처리, 양천주민편익시설 증축, 시설비

따로붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 합의각서 1부

3.설계변경 내역서(총차, 3차수) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	07/07 권오식
협조자
시행	설비부-10761	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개