투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 도로굴착복구 시행도로 정비구간 서울형 포장설계 협의 회신

1. 도로관리과-8582호(‘16.5.31) 및 동부도로사업소 도로보수과-4837
(‘16.6.9)관련입니다.

2. 우리시험소에서는 적정 포장단면두께 적용을 통한 포장수명 연장과 장기적 관리비용 절감을 목표로 서울형 포장설계법을 적용한 포장단면두께 설계를 시행하고 있습니다.

3. 2016년 서울형 포장설계법 적용 의뢰 구간은 101개소(완료 54개소, 잔여47개소)이며, 설계 후 발주 및 시공 일정을 고려하여 잔여물량에 대한 설계 완료(예정일 ‘16.9.9)를 위하여 업무추진 중에 있습니다.

‘16.6.30 현황

구분	서울형 포장설계법 시험포장 구간			소성변형 발생구간			공동 발견 구간			기 타			총 계
	계획	실적	잔여	계획	실적	잔여	계획	실적	잔여	계획	실적	잔여	계획	실적 누계	잔여
16년 4월	17	17	0	77	0	77	6	0	6	1	0	1	101	17	84
16년 5월	17	0	0	77	0	77	6	6	0	1	0	1	101	23	78
16년 6월	17	0	0	77	30	47	6	0	0	1	1	0	101	54	47

※ 지지력 조사(FWD) 3월(해빙기) 이후 가능

4. 따라서 귀 사업소에서 요청한 도로굴착복구 시행도로 정비구간에 대한 서울형 포장설계법을 활용한 아스팔트 포장단면두께 설계는 기존 잔여물량 설계 완료 후 시행이 가능함을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로관리과장),서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
주무관	이진욱		도로포장연구센터장	백종은		품질시험소장	07/07 한민희
협조자
시행	도로포장연구센터-1447	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동) 서울특별시 품질시험소 도로포장연구센터	/
전화	02-3462-6718	/전송	02-3462-6710	/	wooks@seoul.go.kr	/	대시민공개