문서번호	방재시설부-10487
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	07/07 임춘근
협조

경춘철교 정비공사

신축이음장치 변경에 따른 검토 보고

2016. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

경춘철교 정비공사

신축이음장치 변경에 따른 검토 보고

경춘철교 정비공사와 관련하여 설계에 반영된 신축이음장치가 마감레벨 및 설치방법이 시방규정과 맞지 않아 당 현장과 부합되는 신축이음장치로 변경하는 책임건설사업관리기술자로부터 실정보고 사항이 통보되어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 경춘철교 정비공사

❍ 위    치 : 노원구 월계동 224-3번지 일대

❍ 규    모 : 경춘철교(L=176.5m, B=3m) 보수보강, 시설물 설치

❍ 기    간 : 2015. 1. ~ 2016. 7.

❍ 도 급 비 : 4,461백만원

❍ 시 공 사 : 대흥토건㈜

❍ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소

실정보고 내용

❍ 당초 반영된 신축이음장치(뉴모노셀 No.30mm)는 H-BEAM 상단에 거치토록       계획되어 있으나, 실측결과 H-BEAM 상단에 거치 시 무늬강판 레벨보다 높게       설치되고, 용접시 무늬강판에 용접토록 되어 있어 제기능 역할에 부적합하여 당 현장과       부합되는 신축이음장치로 변경이 필요함

< 당초 설치 계획도 >	< 문제점 1 – 마감레벨 부적합 >

< 당초 설치 계획도 >	< 문제점 2 – 용접시 하중에 따른 제기능 부적합 >
< 당초 설치 계획도 >	< 변경 설치 계획도 >

- 공사비검토                                             (단위 : 천원)

구 분	공종명		규 격	단위	당 초		변 경		증 ․ 감		비고
					수 량	공사비	수 량	공사비	수 량	공사비
토목	상부공	신축이음장치		m	78	41,831	-	-	감 78	감 41,831
		신축이음장치		m	8	4,289	-	-	감 8	감 4,289
		신축이음장치	Evazote	m	-	-	86	27,159	증 86	증 27,159
	토목소계					46,120		27,159		감 18,961
직 접 공 사 비				식	-	46,120	-	27,159	-	감 18,961
제 경 비				식	-	19,304	-	12,597	-	감 6,707
도 급 액				식	-	65,424	-	39,756	-	감 25,668

책임건설사업관리기술자 검토내용

❍ 경춘철교 정비공사 시행 중 상기와 같이 신축이음장치 변경 설치에 대한  실정보고를 검토한 결과, 설계에 반영된 신축이음장치는 일반 도로교에서 사용되는 제품으로서 당 현장의 조건과 부합되지 않고, 마감레벨 및 설치방법이 시방규정과 맞지 않아 당 현장과 부합되는 신축이음장치로 변경하여 설치함이 적정하다고 판단됨.

구분	당초 신축이음장치(뉴모노셀)	변경 신축이음장치(Evazote)	비 고
제품이미지

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 책임건설사업기술자의 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되므로 승인조치하고자 함

붙임 : 1) 책임건설사업관리기술자 검토의견 1부. 끝.