문서번호	방재시설부-10583
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	07/08 임춘근
협조
	공원시설과장		김인숙

- 경춘철교 정비공사 -

준공기한 연기검토보고

2016. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 경춘철교 정비공사 -

준공기한 연기검토보고

경춘철교 정비공사중 건설사업관리기술자가 제출한 준공기한 연기보고건에  대한 적정성 검토보고 사항임

추진근거

❍ 선진경춘감-16-434(2016. 7. 6)

- 경춘철교 정비공사 준공기한 연장요청

사업개요

❍ 공 사 명 : 경춘철교 정비공사

❍ 규    모 : 경춘철교 정비 L=176m

- 기초부 보수보강, 상판교체 신설 및 엘리베이터 설치, 상부포장 등

❍ 사업기간 : 2015. 1. 6 ∼ 2016.07.16

❍ 시 공 사 : 대흥토건(주)

❍ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소

❍ 도 급 비 : 4,461백만원

준공기한 연기

❍ 연기요청내용

- 경춘철교 우안 엘리베이터 및 계단설치로 기존 자전거도로 및 보행자도로   폭이 축소(B=6.0m→b=3.5m)됨에 따라 도로폭 확보를 위하여 업무지시

- 도로폭 확보지시에 따라 중랑천 우안측에 수변데크 설치토록 실정보고 승인    하였으나. 수변데크 설치에 따른 절대공기가 부족한 실정임

․ 실정보고 승인 : 방재시설부-10247(2016.7.4.)

준공기한 연장일수 검토

❍ 수변데크 설치 절대공기 소요일수 : 25일

❍  실정보고 승인일 : 2016년 07월 04일

❍   중복일수 공제 : 2016년 07월 05일 ~ 07월 16일(11일)

❍  준공기한 연장일수 : 25일 – 11일 = 14일

❍  준공기한 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2015. 1. 6 ~ 2016. 7. 16	2015. 1. 6 ~ 2016. 07. 30	14일 연장

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

책임건설사업관리기술자 의견

❍ 경춘철교 정비공사의 준공기한 연장요청에 대하여 상기와 같이 검토한 결과, 경춘철교 우안 엘리베이터 설치에 따른 기존 자전거 및 보행자도로 폭 확보를 위하여 수변데크를 설치함에 있어 절대공기 25일이 소요되므로, 당초 준공기한(2016년 07월 16일)을 초과하게 되므로, 원활한 수변데크 공사를 위하여 공사계약일반조건 제26조에 따라 준공기한을 연장함이 적정하다고 판단됨.

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 공기연장건에 대하여 책임건설사업관리기술자 의견이 적정한 것으로 판단되므로 공기를 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토서 1부. 끝.