서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기 의뢰(교통약자를 위한 무장애 보행환경 조성 기본 및 실시설계 용역)

1. 보행정책과-207(2016.7.7.)호와 관련입니다.

2. 『교통약자를 위한 무장애 보행환경 조성 기본 및 실시설계용역』과 관련하여 관계기관 협의 지연 등으로 인해 준공기한 연기를 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 교통약자를 위한 무장애 보행환경 조성 기본 및 실시설계

나. 계약업체 : ㈜동일기술공사 대표 김수보

다. 계약금액 : 금육천구십만원정(￦60,900,000-)

라. 준공기한

- 당초 : 2016.7.12

- 변경 : 2016.8.12

마. 연기사유

- 횡단보도 위치 조정 관련 규제심의 등 서울지방경찰청과의 협의 지연되었으며, 향후 보도환경개선과에서 시행하는 설계지도 점검 및 보완 등을 고려하여 준공기한 연기 필요

바. 귀책소재 : 서울특별시

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	보행정책과장
주무관	이석연		보행시설팀장	박찬규		보행정책과장	07/08 이방일
협조자
시행	보행정책과-213	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2439	/전송		/	wartry@seoul.go.kr	/	대시민공개