투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약-관급자재(흙콘크리트)구매(기반시설 개선공사)

1. 시설관리과-1769(2016.6.24.)호와 관련 입니다.

2. 시설관리과에서 시행중인 “ 「기반시설개선공사」에 사용되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경 계약을 하고자 합니다.

가. 납품요구번호 :12-16-1-27514-00 (흙콘크리트)

나. 납품기한 연기 : (당초) 2016.06.30.  (변경) 2016.07.30.

다. 변경사유 : 공사시기 미도래.

붙임 변경내역서 1부.  끝.

주무관	이규옥		총무과장	07/11 박병현
협조자
시행	총무과-11907	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개