문서번호	정수시설과-7402
결재일자	2016.7.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희	유영춘	07/11 이성락
협 조
	주무관		오재승
	주무관		최년수
	주무관		김진수

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

(천장 텍스 설치공사)

2016. 07.

영등포아리수정수센터

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리센터【천장 텍스 설치공사】시행중 계약금액 증감 사항이 발생하여 자체 심의 위원회를 개최하고 심의 의결내용에 따라 아래와 같이 설계변경 시행코자함

공사현황

◯ 공 사 명 : 천장 텍스 설치공사

◯ 공사기간 : 2016. 06. 01. ～ 07. 30.

◯ 계약금액 : 금18,907,800원

◯ 시공업체 : 주식회사금빛가람종합개발  대표 백영학

심의위원회 개최 결과

◯ 위원장 : 정수시설과장 유영춘

◯ 위  원 : 공업6급 오재승외 2명, 간사 1명

◯ 일  시 : 2016. 7. 11(월) 10:00 ~ 11:00

◯ 장  소 : 정수시설과 사무실

◯ 안  건 : 천장 텍스 설치공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의위원회 심의 내용

◯ 시공 물량 증,감에 대한 적정성 검토

◯ 제경비 정산(건강보험료외 )에 대한 적정성 검토

◯ 기타 설계변경관련 적정성 검토

◯ 설계변경 공사비

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	18,907,800	18,147,000	감 760,800
공급가액	17,188,909	16,497,272	감 691,637
부가세	1,718,891	1,649,728	감 69,163

조치계획

◯ 위와 같이 시공물량 변동 및 제경비 변경으로 인한 설계변경 사항을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 내역서, 심의 의견서 각 1부 끝