문서번호	계획설계과-6226
결재일자	2016.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		계획설계과장	급수부장
양윤선		이임섭	07/11 이규상
협 조
	주무관			최춘근

“낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역”

6월 공정보고회 결과 보고

2016. 7.

상수도사업본부

급수부

「낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」

6월 공정보고회 결과 보고

「낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」에 대한 6월 공정보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

용 역 명	낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역
사업위치	종로구 창신동 23-320 일대
시설규모	배수지 용량 : 2,000㎥ 송배수관 부설 : D=400㎜, L=0.67㎞
용역목적	종로구 창신2동외 8개동의 고지대에 대해 배수지 적정 체류시간(7.9hr→12.7hr) 확보로 누수‧정전 등 사고 시에도 단수 없이 수돗물을 안정적 공급할 수 있는 무단수 급수체계 구축
용역기간	2016. 4. 29. ~ 2016. 12. 31.
용 역 비	120,615천원
용 역 사	㈜ 동일기술공사

Ⅱ		공정보고회 개요

▢ 일    시 : 2016. 7. 8.(금) 15:00 ~ 15:40

▢ 장    소 : 급수부장실

▢ 참 석 자 : 8명

○ 내부(6명) : 급수부장, 계획설계과장, 시설과장 등

○ 용역사(2명) : ㈜동일기술공사 용역기술자

Ⅲ		보고내용

▢ 상위계획 및 기본사항 검토(급수량 및 급수인구 등)

▢ 배수지 배치계획

○ 구내배관 및 배수지별 균등 측면의 배치계획 검토

- 측량조사 및 지반조사 결과, 송수관로 노선과 연계하여 선정예정

- 주변 민원 및 부지여건을 감안 한 대안 제시

▢ 송배수관로 노선 계획

○ 배수지간 균등분배 및 유지관리 측면 고려하여 계획

○ 기존 송수관로 어린이집 통과 구간은 철거하고, 이격하여 신설

○ GIS(상수도 지리정보시스템)를 반영하여 선정

Ⅳ		주요 검토의견

▢ 배수지 계획

○ 어린이집 인근 국유지 부지 확인 및 관로 이설이 가능할 경우 이설후 기존관 철거나 폐쇄 등 검토

○ 배수지 인근 교회 민원을 고려하여 무진동 공법, 방음벽 설치 등 검토

○ 시공시 편의성을 위해 다양한 방안 모색 및 이설비 등이 누락되지 않게 설계에 반영 검토

▢ 송배수관로 노선 계획

○ 횡단굴착을 실시하여 지장물 조사 후 노선결정

- 지장물 위치 및 기존관의 관종, 상태 등 확인

- 관종이 CIP, SP관의 경우 갱생이 가능한지 교체가 필요한지 검토하고 보고서에 기재

○ 관부설 공사시 주민들의 편의(우회도로 계획 및 입간판 설치 등) 고려 검토

▢ 기타 사항

○ 도시계획 시설결정 시 관로부분 포함하여 추후 유지관리가 용이하도록 함.

○ 기본설계가 충실해야 실시설계 등 후속 성과물의 성과가 좋으므로 기본설계 단계에서부터 철저한 검토가 필요 함.

Ⅴ		향후계획

▢ 7월 공정보고회(8월 초 예정) 개최 시까지 급수구역, 배수지 배치계획, 송배수관로 노선 계획 등 확정

▢ 중간보고 및 자문회의 개최 : 9월 초(예정).

따로붙임 : 1. 6월 공정보고 자료 1부.

2. 회의 전경 1부.  끝.