문서번호	도로보수과-3197
결재일자	2016.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		국중진	07/11 이종엽
협조

「교차로 및 버스전용차로」

소성변형 발생구간 정비계획 보고

2016. 07. 11

성동도로사업소

(도로보수과)

「교차로 및 버스전용차로」

소성변형 발생구간 정비계획 보고

버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생구간에 대하여 「서울형 포장 설계법」을 적용하여 설계 및 정비함으로써 차도 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진경위

○ 2016. 1. 22 : 버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생구간 일제조사 실시 요청(도로관리과→사업소)

○ 2016. 2. 05 : 버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생현황 제출

(사업소→도로관리과)

○ 2016. 2. 19 : 버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생구간 일제정비 요청(도로관리과→사업소))

○ 2016. 4. 07 : 교차로 및 버스전용차로 소성변형 구간 정비방안

검토 요청(사업소→도로포장연구센터)

○ 2016. 6. 01 : 버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생구간 현장조사 협조요청(도로관리과→사업소, 포장연구센터 현장지지력조사시 차량지원 및 코아채취)

○ 2016. 6. 09 : 5차 작업지시(코아채취 57공, 긴급복구업체)

○ 2016. 6. 09 : 포장연구센터 지지력조사 및 긴급복구 아스콘코아 채취

○ 2016. 7. 08 : 성동도로사업소 관내 「‘16년 버스전용차로 및  교차로 소성변형 발생 구간」서울형 포장설계법 적용 계획단면(안) 송부(도로포장연구센터→사업소)

○ 2016. 7. 08 : 포장연구센터와 유선협의

- 일반아스콘으로 설계, 개질로변경 시공가능

- 시공상 어려움이 있는 경우 변경 시공가능

□ 포장설계 단면(안)

위치	구분	코아 두께 (cm)	설계 결과
			폭 (m)	연장 (m)	보수공법	층	두께(cm)
상봉지하차도앞→상봉역삼거리	버스전용	20-22	3.5	215	30cm (27cm) 전단면 재포장	표층	5
						중간층	7
						기층	18(15)
중랑교버스정류장(시외)	버스전용 (정류장)	21-22	3.5	145	30cm (27cm) 전단면 재포장*	표층	5
						중간층	7
						기층	18(15)
떡전교버스정류장(시내)	버스전용 (정류장)	19-30	3.5	140	30cm (27cm) 전단면 재포장*	표층	5
						중간층	7
						기층	18(15)
사가정로 270 월편 → 장안동삼거리	교차로	24-30	12.0	240	6cm 절삭 덧씌우기	표층	6
아차산로 356 → 자양사거리	교차로	22	13.0	240	5cm 절삭 덧씌우기	표층	5
자양로 85 → 자양사거리	교차로	25-30	12.0	240	5cm 절삭 덧씌우기	표층	5
능동로 85 월편 → 건대입구사거리	교차로	26-41	13.0	150	5cm 절삭 덧씌우기	표층	5
금호로 62 ↔ 금호사거리	교차로	12-20	20.0	95	20cm 전단면 재포장	표층	5
						중간층	5
						기층	10
봉우재로 240 → 우림시장오거리	교차로	24	10.0	70	5cm 절삭 덧씌우기	표층	5
용마산로 54 → 중곡사거리	교차로	17-21	10.0	100	10cm 절삭 덧씌우기	표층	5
						중간층	5
용마산로 71 → 중곡사거리	교차로	18-25	10.0	70	7cm 절삭 덧씌우기	표층	7

□ 설계단면(안) 시공상 문제점

○ 기존 포장두께보다 설계단면 두께가 커서 하부 보조기층을 절취 및 다짐에 따른 교통체증으로 인한 시공 어려움

- 버스전용차로 상봉지하차도앞 등 3개구간 및 금호사거리 구간

□ 추진계획

○ 기존두께에 맞춰서 개질아스콘으로 변경하여 포장단면 변경 시공

(도로포장연구센터에서 단면설계시 일반아스콘을 기준으로 설계)

○ 포장 시공(안)

위치	구분	코아 두께 (cm)	시공예정
			폭 (m)	연장 (m)	보수공법	층	두께(cm)
상봉지하차도앞→상봉역삼거리	버스전용	20-22	3.3	159	30cm → 20cm 전단면 재포장	표층	개질 5
						중간층	개질 7
						기층	#467 8
중랑교버스정류장(시외)	버스전용 (정류장)	21-22	3.7	140	30cm → 21cm 전단면 재포장	표층	개질 5
						중간층	개질 7
						기층	#467 9
떡전교버스정류장(시내)	버스전용 (정류장)	19-30	3.7	118	30cm → 19cm 전단면 재포장	표층	개질 5
						중간층	개질 7
						기층	#467 7
금호로 62 ↔ 금호사거리	교차로	12-20	6.5~ 12.8	112	20cm → 12cm 전단면 재포장	표층	개질 5
						중간층	일반 7
사가정로 270 월편 → 장안동삼거리	교차로	24-30	13.5	222	6cm 절삭 덧씌우기	표층	일반 6
아차산로 356 → 자양사거리	교차로	22	13.0	240	5cm 절삭 덧씌우기	표층	일반 5
자양로 85 → 자양사거리	교차로	25-30	12.0	240	2013년 예방적 유지보수 구간으로 제외
능동로 85 월편 → 건대입구사거리	교차로	26-41	11.5~13	102	5cm 절삭 덧씌우기	표층	개질 5
봉우재로 240 → 우림시장오거리	교차로	24	9.7~ 17	75	5cm 절삭 덧씌우기	표층	일반 5
용마산로 54 → 중곡사거리	교차로	17-21	6.5~9	86	10cm 절삭 덧씌우기	표층	일반 5
						중간층	일반 5
용마산로 71 → 중곡사거리	교차로	18-25	9.5~ 9.5	71	7cm 절삭 덧씌우기	표층	개질 7

□ 조치계획

○ 위 포장시공(안)으로 「2016년 도로손상부분 긴급복구공사」에 작업지시하여 재포장공사 완료 후 설계변경 및 정산조치하고자 하며

○ 공사현장 여건상 시공의 어려우므로 변경된 포장두께 현황을 도로포장연구센터에 송부하고자 함.

붙임 : 위치도 1부.   끝.